세계유산도시고창 사진전시관 치유문화 거점공간 조성

제  안  요  청  서

2024. 09.

고창문화도시센터

Ⅰ. 사업개요

제1장. 사업 개요

1. 개요	3

2. 사업목적 및 추진방향	3

3. 사업대상 및 범위	4

제2장. 입찰 개요

1. 입찰 및 낙찰자 결정방법	6

2. 입찰참가자격	6

3. 입찰참여방식	7

4. 하도급제도	7

5. 입찰 추진일정	8

6. 입찰참가 제출서류	9

제3장. 과업내용 및 세부지침

1. 과업내용	11

2. 상세요구사항	12

3. 일반지침	28

4. 기술지침	29

5. 제출도서의 종류 및 규격	32

6. 제안서 포함사항	32

7. 제안사 설명서(정량) 및 제안서(정성) 작성방법	34

8. 제안요청서 효력	36

제4장. 제안서 평가

1. 평가 일정 및 방법	39

2. 제안서 설명(기술능력평가)	40

3. 평가항목 및 배점기준	41

4. 제안서 실격처리 사항	45

제5장. 협상 및 계약

1. 협상적격자 선정	46

2. 협상진행	46

3. 계약체결 및 이행	47

4. 계약해지	47

제6장 과업수행시 준수사항

1. 일반사항	48

2. 사업수행자의 책임	49

3. 유지관리 사항	49

[별첨 자료 / 관련 서식]	50

목 차

1		개요

가. 사 업 명 : 세계유산도시고창 사진전시관 치유문화 거점공간 조성 사업

나. 사업기간 : 계약체결일 ~ 11월 30일

다. 소요예산 : 500,000,000원 / 부가세포함

(창작, 설계, 구매, 제작, 설치, 철거 및 보험료, 제세공과금, 기타 부대비용 등 사업에 필요한 비용 일체 포함)

라. 사업내용 : ICT 미디어와 결합한 치유공간 조성과 실감콘텐츠제작

마. 사업대상 : 사진전시관

바. 계약방법 : 협상에 의한 계약 (일반 경쟁 입찰)

2		사업목적 및 추진방향

가. 사업목적

◦ 고창문화도시센터 치유 공간 이용객의 치유를 목적으로 한  공간 구성과 미디어아트 기반의 실감콘텐츠 제작

◦ 최신 ICT(정보통신기술) 트랜드를 적용한 실감콘텐츠 활용을 통해 치유에 대한 이용객 이해도 확대와 치유 공간 방문 활성화

나. 추진방향

◦ 안전사고예방을 최우선적으로 고려한 공간 구성 설계 제작

◦ 이용대상은 전 연령층의 모든 국민으로 하되 치유 콘텐츠가 포함된 몰입도가 높은 구성과 연출로 구현

◦ 참신하고 흥미로운 구성과 스토리텔링을 바탕으로 누구나 즐길 수 있는 고창문화도시센터 실감형 미디어아트 콘텐츠 개발

◦ 영상의 의도와 목적을 고려한 사운드 적용(배경음악, 효과음 등)

3		사업대상 및 범위

가. 대상장소 : 세계유산도시고창 사진전시관

평면도
전경

나. 사업범위

(1) 미디어아트 실감콘텐츠 제작

※ 자연과 그리고 치유도시 고창의 7개 보물을 활용한 기획 및 제작

(2) 5개의 면 미디어파사드 설치 및 운영 프로그램 구축

※ 측정방법에 따라 일부 면적에 차이가 있을 수 있음.

(3) 이용객에게 힐링과 치유를 경험하는 공간 인테리어

※ 구성에 따라 천정 오픈 있을 수 있음.

(4) 미디어아트 구축을 위한 시스템(영상,음향) 구매 설치

(5) 안정적이고 효과적인 유지·관리·운영방안 및 안전사고 방지 방안 매뉴얼 작성 및 운영자 교육

(6) 치유 공간 구축을 위한 그 밖에 필요한 사항

Ⅱ. 입찰 개요

1. 입찰 및 낙찰자 결정방법

가. 기본방침 : 본 사업은 고도의 창의성과 전문성이 요구되므로 근거법령에 의거하여 공정한 기준과 절차에 따라 준비된 우수 제안업체를 선정하고자 함

나. 입찰방식: 일반경쟁입찰

다. 사업자선정방식: 협상에 의한 계약

(1) 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제43조 및 제44조

(2) 「지방자치단체 입찰시 낙찰자결정기준」(행정안전부 예규 제134호) 준용

다. 평가방식: 기술평가(90%) / 가격평가(10%)

라. 사업설명회 미개최

2. 입찰 참가자격

가. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제13조 및 같은 법 시행규칙 제14조 규정에 의한 자격을 갖추고, 동법 시행령 제92조에 해당하지 않는 업체(입찰서 제출 마감일 전일까지 조달청 입찰참가자격 등록된 업체)

나. 입찰공고일 기준으로 사업자등록증 상 대한민국에 주소지를 두고 실제로 인력·장비를 갖추어 사업을 영위하고 있는 업체

다.「소프트웨어산업 진흥법」제24조에 의한 소프트웨어사업자(디지털콘텐츠개발서비스사업)[업종코드 1469]로 입찰참가 등록한 업체

※ 본 사업은 총예산 20억원 미만 사업으로「소프트웨어 산업진흥법」제48조 2 및「중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침」(과학기술정보통신부 제2020-98호)에 따라 대기업 및 중견기업은 입찰에 참여할 수 없음

라.「산업디자인진흥법」제9조에 따른 산업디자인전문회사(환경디자인분야)[업종코드 4442] 환경디자인을 포함한 종합디자인분야[업종코드 4444]로 등록된 업체

마.「정보통신공사업법」제14조에 따른 정보통신공사업[업종코드 0036]으로 신고를 필한 업체

바. ｢영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률｣ 제57조(비디오물제작업 등의 신고)에 의한 비디오물 제작업[업종코드: 3244] 신고를 필한 업체

사. 「중소기업기본법」제2조에 따른 중소기업자로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 중소기업확인서를 소지한 자

* 중소기업확인서는 전자입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함

아. 제안공고일 현재 휴업중이거나 부정당 업체 지정, 영업(업무)정지, 인허가등록 취소 등 행정처분을 받은 사실이 있거나 폐업신고 수리를 받은 업체(자)는 입찰에 참가 불가

3. 입찰참여방식 : 단독이행 또는 공동수급체 구성 (분담이행)

가. 단독이행시에는 입찰참가자격을 모두 갖춘 업체만 참여 가능하며, 분담이행시에는 2.다의 자격을 갖춘 업체가 대표자가 되어 공동수급체를 구성하여야 함

나. 공동수급체를 구성하여 제안하는 경우에는 대표업체를 포함하여 3개 업체 이내로 하고 대표업체의 지분율은 51% 이상, 구성원별 계약 참여 최소 지분율 10% 이상으로 구성

다. 공동수급체 대표자는 입찰에 필요한 대표권 행사

라. 입찰 등록 이후 발주기관의 승인 없이 공동수급 참여 업체 변경 및 업체 간 권리의 전부 또는 일부 양도 불가

마. 공동수급체 구성원은 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 의한 계열사가 아니어야 하며 본 사업의 다른 공동수급체 중복 참여 불가

바. 제안서 제출 시 공동수급협정서(필요시 전자제출), 합의각서, 대표자 선임계 제출

4. 하도급제도

가. 본 사업은 수주자(공동계약의 경우 공동수급체 구성원 포함)가 직접 수행함을 원칙으로 하며, 「소프트웨어산업 진흥법」과 관련된 사항(콘텐츠 제작 등)은 하도급이 원칙적으로 불허됨. 다만 「소프트웨어산업 진흥법」을 제외한 나머지 분야는 적법한 범위 내(하도급 비율은 공종별 50%를 초과할 수 없음)에서 부득이한 경우 발주처의 승인하에 하도급 계약을 허용함. 재하도급은 불허함.

나. 발주기관의 승인 없이 하도급을 하거나 승인을 얻은 하도급 조건을 변경한 경우 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제92조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한)에 의거하여 부정당업자로 입찰참가자격을 제한함

5. 입찰 추진일정

구 분		추 진 내 용		일 정 (예정)
입찰공고		입찰공고 (나라장터 홈페이지)		공고문 참조
제안서 접수		방문접수만 가능(평일 근무시간에 한함)		공고문 참조
제안서 심사		제안서 발표평가(PT) ※ 심사 대상자에 평가일정 별도 공지 예정		공고문 참조 (별도 공지)
기술 및 가격 협상		1순위 업체 협상 실시 ※ 협상 결렬 시 차순위 업체 대상 협상 실시		협상개시통보 후 10일 이내
계약 체결		계약체결 및 사업착수		협상완료 이후

가. 질의응답 – 공고문 참조

(1) 질의서 접수 : 공고문 참조

(2) 질의서 답변 : 공고문 참조

(3) 접수방법 및 접수처: 공고문 참조 – 전자우편(gogctf@gctf.or.kr)

(4) 질의조건 및 응답

- 모든 질의는 제안요청서 서식에 따라 전자우편으로 제출해야 함.

- 질의에 대한 답변 사항은 본 제안요청서와 동일한 효력을 가짐.

- 질의응답은 1회로 제한하며, 질의 시 필요서류(도면 등) 요구

(5) 문 의 처: 고창문화도시센터(치유특화팀)(☏070-4175-6829)

6. 입찰참가 제출서류

가. 서류 항목

연번	구 비 서 류	비 고
1	입찰제안서 접수	서식 1
2	입찰참가신청서 1부	서식 2
3	위임장 및 재직증명서 1부	서식 3, 서식 4
4	사업자등록증 사본, 법인등기부등본, 법인인감증명서, 사용인감계, 참가자격 관련 등록증, 면허증사본, 중소기업․소상공인확인서 1부	서식 5
5	서약서	서식 6
6	청렴계약 이행서약서 1부	서식 7
7	보안서약서 1부	서식 8
8	입찰보증금 지급각서 1부	서식 9
9	개인정보 수집, 이용, 제공 동의서	서식 31
10	사업수행능력평가서(정량적 평가분야) : 2부	서식 10
	① 사업수행능력 자기평가표	서식 11
	② 제안업체의 일반현황 및 연혁	서식 12
	③ 제안응모 대표자 선임계, 공동수급협정 현황, 공동수급표준협정서, 공동수급합의각서	서식 13 ~ 서식 16
	④ 최근 5년간 사업수행실적, 사업 이행실적 증명서	서식 17, 서식 18
	⑤ 인력 보유현황, 사업수행조직 및 인원구성, 참여인력 현황 총괄표, 참여인력 이력사항	서식 19 ~ 서식 23
	⑥ 제안업체 경영 상태	서식 24
	⑦ 신용평가등급확인서	서식 25
	⑧ 신인도 평가 관련 확인서	서식 26
11	제안평가서(정성적 평가분야)	서식 27
	① 제안서 및 발표자료 A4 30매 이내 11부 (원본 1부, 사본 10부 – 사본은 업체명 및 관련 그림/단어 삭제)	-
	② 제안서 및 발표자료 파일 USB 2개	-
12	① 입찰가격제안서	서식 28
	② 산출내역서	서식 29
13	서면질의서	서식 30

나. 제안서 관련 서류

(1) 기술(사업)제안서 11부 [업체명 표기 및 서명/날인 1부, 미표기 10부]

(2) 제안사 설명서 2부 [업체명 표기 및 서명/날인 / 정량적 평가분야]

(3) USB 2식 [입찰참가서류(PDF)  및 상기의 제안서 제출서류(PDF, PPT)]

다. 유의사항

(1) 제안서의 제출은 우편 접수가 불가하며, 접수기간의 지정시간까지 고창문화도시센터 치유특화팀(고창군 고창읍 태봉로 361 전북대학교 고창캠퍼스 문화관 2층)으로 제출하여야 함. 대리인 접수 시 신분증, 위임장, 재직증명서, 법인(사업자) 인감증명서 또는 사용인감계, 4대 보험 중 어느 하나 가입 증명자료(최근 3개월 이내) 각 1부 지참

(2) 제안업체를 인식할 수 있는 일체의 표기 사용 불가하나, 보관용 1부는 용역을 수행할 모든 참여업체의 대표자가 각각 서명 날인하여 제출

(3) 제안서 내용 중 허위 사실이 판명될 경우 평가 대상에서 제외되며, 계약 후라도 계약 파기와 함께 인적, 물적, 기간적 손실에 따른 손해 배상 청구 가능

(4) 제출서류가 미비하거나, 심사에 필요한 내용항목의 누락 등 구비서류가 불충분한 경우에는 심사대상에서 제외될 수 있음

(5) 실적증명은 첨부양식을 원칙으로 하되, 첨부양식 내용이 모두 포함된다는 전제로 자체 양식도 허용

(6) 발주기관은 제안내용에 대한 확인 및 검증이 필요하다고 판단될 경우 제안자에게 입증자료를 요구할 수 있으며, 입증 자료를 제출하지 못할 경우 불가능한 것으로 판단함

(7) 본 제안요청서에 명시되지 않은 사항일지라도 본 사업에 반드시 필요하다고 인정되는 사항은 과업범위에 포함된 것으로 판단함

라. 문의처

(1) 입찰 및 사업 문의: 고창문화도시센터 치유특화팀 / (☏070-4175-6829)

Ⅲ. 과업내용 및 세부지침

1. 과업내용

가. 창의적인 실감형 디지털 콘텐츠 개발

(1) 미디어파사드를 활용한 실감영상 콘텐츠에 사운드 등의 요소가 가미된 콘텐츠 제작

(2) 7개의 보물을 간직한 고창의 자연과 치유 그리고 고창에서만 느낄수 있는 판타지를 선사하며 이용객에게 힐링과 치유를 경험할 수 있는 콘텐츠로 기획 제작

나. 미디어아트 시스템 구축

(1) 각종 장비 등의 사양은 “상세 요구사항”의 시스템 장비구성에 관한 ECR항목 참조. 제안자가 장비사양 및 규모를 일부 조정해 제안할 수 있음(조정 시 별도 표시하고 사유 등 기재, 다만 협상과정 중 별다른 사유 없이 제안요청서에 요구한 사항보다 낮은 사양과 규모의 제품 제안시 발주처는 제안요청서에 의거해 추가비용 없이 동등장비로 변경을 요구할 수 있음).

(2) 시스템 구축을 위한 설계 및 성과품 도서(도면‧내역서‧설계설명서 등) 작성 및 설치

(3) 시스템 설치에 수반되는 인테리어 제작‧설치

(4) 자연과 치유 공간인테리어 제작‧설치

(5) 운영 및 디지털 콘텐츠 서비스 구현을 위한 인프라 구축(하드웨어 설치에 반드시 수반되는 설비 일체 설치 등)

(6) 기존에 운영중인 냉난방기 이동 설치 등

(7) 효과적인 유지‧관리‧보수‧운영방안 매뉴얼 작성 및 운영자 교육

(8) 준공청소 및 시범 운영

(9) 기타 사업목표 달성에 필요하여 발주기관이 요구하는 사항

2. 상세요구사항

가. 총괄표

구분	고유번호	설명	개수
시스템 장비구성 요구사항 (Equipment Composition Requirement)	ECR	◦목표사업 수행을 위해 필요한 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 등의 도입 장비에 대한 요구사항	2
콘텐츠 개발 요구사항 (Contents Development Requirement)	CDR	◦콘텐츠 개발의 세부조건과 콘텐츠의 기능·성능 등 콘텐츠 제작에 필요한 요건을 기술한 것	5
기능 요구사항 (System Function Requirement)	SFR	◦콘텐츠 개발과 관련하여 사용자가 반드시 수행할 수 있어야하는 기능(동작)에 대하여 기술함	1
성능 요구사항 (Performance Requirement)	PER	◦목표 시스템의 처리속도 및 시간, 처리량, 동적․정적 용량, 가용성 등 성능에 대한 요구사항을 기술함	3
시스템 구축 요구사항 (System Installation Requirement)	SIR	◦목표 시스템과 외부 환경이 조화되는 가운데 작동하도록 하는 조건이나 특성 및 규약 등에 대한 요건 기술	5
테스트 요구사항 (Test Requirement)	TER	◦도입되는 장비의 성능 테스트(BMT) 또는 구축된 시스템이 목표 대비 제대로 운영되는가를 테스트하고, 점검하기 위한 테스트 요구사항을 기술함	2
보안 요구사항 (Security Requirement)	SER	◦정보 자산의 기밀성과 무결성을 확보하기 위해 목표 시스템의 데이터 및 기능, 운영 접근을 통제하기 위한 요구사항 기술	3
품질요구사항 (Quality Requirement)	QUR	◦목표 사업의 원활한 수행 및 운영을 위해 관리가 필요한 품질 항목, 품질평가대상 및 목표에 대한 요구사항 등 기술 ◦신뢰성, 사용성, 유지관리성, 이식성, 보안성으로 구분하여 기술함	2
사업관리 요구사항 (Project Management Requirement)	PMR	◦프로젝트의 원활한 수행을 위한 관리 방법 및 추진 단계별 수행방안에 대한 요구사항을 기술함	11
사업지원 요구사항 (Project Support Requirement)	PSR	◦프로젝트의 원활한 수행을 위해 필요한 지원 사항 및 방안에 대한 요구사항을 기술함 ◦시스템/서비스 안정화 및 운영, 교육훈련 및 기술지원, 하자보수 또는 유지관리 요구사항 등을 기술함	3
기타 요구사항		◦안전 관리 등	1
합계			38

ㅇ SW분리발주 제외 사유

- 콘텐츠에 최적화된 하드웨어와 소프트웨어 제품을 선택할 수 있는 기회를 제공하여 고품질의 콘텐츠를 확보하고 원활하게 시스템을 운영할 수 있는 환경 구축

나. 시스템 장비구성 요구사항

요구사항 고유번호		ECR-001
요구사항 명칭		시스템 구성요건 공통사항
요구사항 분류		시스템 장비구성 요구사항
요구사항 상세설명	정의	공통사항
	세부 내용	ㅇ 시스템 구축을 위해 필요한 인프라(H/W 등) 일체의 구매, 납품 및 설치는 일괄공급 방식으로 완료하여야 한다 ㅇ 사업자는 각종 S/W를 도입시스템에 탑재하고, 그 원본이 저장된 기록매체를 납품하여야 함 ㅇ 각종 장비의 설치 장소/공간, 설치 대수 및 구성 등은 발주기관과 협의 후 결정함. ㅇ 설치 중 장비가 손상될 우려가 있을 시 필요한 방지책을 강구해야 하며, 피해발생 시 응급조치 후 사업자의 부담 및 책임 하에 원상복구 해야 함.

요구사항 고유번호		ECR-002
요구사항 명칭		소요 장비 구매 및 설치
요구사항 분류		시스템 장비구성 요구사항
요구사항 상세설명	정의	시스템 구축에 필요한 장비의 구매 및 설치
	세부 내용	ㅇ 영상시스템 – 사이즈 가로 세로 바닥(5면) 10X20M 총73㎡, 해상도 WUXGA, 밝기 6,000lm, 광원 Laser Diode, 렌지시프트, 엣지브랜딩 지원 가능 ㅇ 콘트롤러 시스템과 운영 컴퓨터 ㅇ 미디어시스템 – 운영체제와 서버 컴퓨터군(모니터, 기가비트 스위치허브, 각종 케이블 등 포함) ㅇ 공간에 맞춤설계(음향) 된 스피커, 파워앰프, 믹서 등 다채널 음향 시스템등 ㅇ 하드웨어 설치, 음향시스템 설치 하드웨어 설치에 필요한 일체 설비 설치 ㅇ 냉난방기 이전 설치-기존에 설치된 냉난방기 이전설치(협의) ※ 상기 장비 이외에 콘텐츠 구동을 위해 필요한 운영체제, 애플리케이션 등의 적정수량 확보가 요구되며, 각각의 라이센스를 모두 포함한 범위이다. ㅇ 또한 납품장비의 파손이나 시험운영 중 장애 발생 시 A/S는 불허하며 동일 사양 이상의 신규 제품으로 즉시 교체 ㅇ 시스템 구축을 위해 필요한 인프라(H/W 등) 일체를 일괄공급방식으로 납품과 설치를 완료하여야 한다

다. 콘텐츠 개발 요구사항

요구사항 고유번호		CDR-001
요구사항 명칭		스토리 개발 및 시나리오 구성
요구사항 분류		콘텐츠 개발 요구사항
요구사항 상세설명	정의	콘텐츠 개발 방향
	세부 내용	ㅇ 콘텐츠는 전문제작자에 의해 총괄되고, 전문가의 자문을 거쳐서 미디어아트에 맞는 스토리를 개발하며, 촬영감독․음악감독 등 핵심 제작참여 인력의 섭외는 발주기관의 승인을 얻어 진행해야 함. ㅇ 제작 및 개발 시 각 담당자는 해당 분야의 내용과 의미를 충분히 이해하고 착수해야 하며, 전문가의 고증 및 객관적인 사실을 반영하여 역사적인 왜곡이 없고 원본의 가치와 의미를 훼손시키지 않는 범위에서 창의적으로 개발함. ㅇ 전문가들의 의견을 적극적으로 반영하고 발주기관과 사업자가 협의하여 스토리라인을 개발함.

요구사항 고유번호		CDR-002
요구사항 명칭		주제 및 분량
요구사항 분류		콘텐츠 개발 요구사항
요구사항 상세설명	정의	콘텐츠 기획
	세부 내용	ㅇ 전체 치유 공간 구성을 감안하여, 시나리오 구성 및 콘텐츠 제작 ㅇ 자연과 그리고 치유도시 고창의 7개 보물과 연계된 콘텐츠 시나리오 구성 ㅇ 영상의 종수와 분량을 제안사가 추가하여 제안할 수 있음 ㅇ 제안서 작성 관련 주제 및 적용기술을 바탕으로 최적(안)을 제시할 수 있음.

요구사항 고유번호		CDR-003
요구사항 명칭		콘텐츠 제작 해상도와 폰트 및 이미지
요구사항 분류		콘텐츠 개발 요구사항
요구사항 상세설명	정의	콘텐츠 기획
	세부 내용	ㅇ 고해상도 UHD 미디어 콘텐츠는 4K(3840x2160)이상으로 제작하되 8K급(7,680×1,080) 이상 제작을 권장한다. ㅇ 폰트 및 이미지의 가독성을 높여 명확하게 인지 가능하도록 개발. ㅇ 저작권에 문제가 없는 이미지 및 폰트 사용.

요구사항 고유번호		CDR-004
요구사항 명칭		제작 언어
요구사항 분류		콘텐츠 개발 요구사항
요구사항 상세설명	정의	콘텐츠 기획
	세부 내용	ㅇ 기본은 한국어이고, 최종원고는 관람객이 이해하기 쉽게 전문가에 의한 교열 및 윤문 작업을 거친다. ㅇ 영어는 자막으로 처리한다

요구사항 고유번호		CDR-005
요구사항 명칭		콘텐츠 개발
요구사항 분류		콘텐츠 개발 요구사항
요구사항 상세설명	정의	콘텐츠 기획
	세부 내용	ㅇ 기획, 연출, CG, 녹음, 촬영, 편집 등 세부작업 내역서 제출. ㅇ 구성안은 발주기관과 사업자가 수시로 수정 보완할 수 있고, 디자인 품질, 사실 고증에 따른 수정요구 시 적극 반영.

라. 기능 요구사항

요구사항 고유번호		SFR-001
요구사항 명칭		제작기술 및 표준
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	고창문화도시센터 내부 시스템 간 연계
	세부 내용	ㅇ 콘텐츠는 고창군에서 공동으로 활용할 수 있도록 개발 - 홈페이지, SNS 등에서 구동이 가능하도록 개발 ㅇ 완료 후 변경이 필요할 경우를 대비하여 수정이 용이하도록 개발해야 함.

마. 성능 요구사항

요구사항 고유번호		PER-001
요구사항 명칭		성능 일반사항
요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	일반 요구사항
	세부 내용	ㅇ 영상 콘텐츠의 화면비율 및 분할은 설치장소의 공간 규모에 맞추어 발주처와 협의하여 추진 ㅇ 음악 및 음향 효과는 콘텐츠의 몰입감을 높일 수 있도록 화면 연출에 맞추어 다채널 서라운드 이상의 고품질로 제작함 ㅇ 장비의 성능을 고려한 개발 방안을 제시하여야 함 ㅇ 시스템 상태를 모니터링 하도록 하여, 성능 상 문제를 미리 파악하여 조치하여야 함

요구사항 고유번호		PER-002
요구사항 명칭		안정적인 시스템 운영
요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	안정적인 운영과 시스템 성능을 고려한 설계 및 구현
	세부 내용	ㅇ 대상시스템에 대하여 안정적 운영지원 및 사용자 지원 방안을 제시 ㅇ 시스템의 성능에 미치는 영향을 고려하여 갱신주기, 연계 장비, 실행시간 등 설정 ㅇ 데이터 연계의 정확성을 위해 개발 및 테스트 환경을 구성하고, 연계 모듈의 기능수행 정확도를 검증한 후 운영 시스템에 이관하여 시스템 운영 ㅇ 사용자 또는 정보가 증가될 경우에도 안정적인 성능을 제공할 수 있어야 하며, 추가 라이선스 비용 등이 발생하지 않아야 함

바. 시스템 구축 요구사항

요구사항 고유번호		SIR-001
요구사항 명칭		작업 범위
요구사항 분류		시스템 구축 요구사항
요구사항 상세설명	정의	시스템 구축 수행 범위
	세부 내용	ㅇ 시스템 구축을 위한 수행 작업의 세부내용은 미디어시스템 구축, 시스템의 최적화 된 운영에 적합한 설비(통신‧음향 등 포함), 공간인테리어, 조명 등을 포괄함.

요구사항 고유번호		SIR-002
요구사항 명칭		미디어시스템의 구성
요구사항 분류		시스템 구축 요구사항
요구사항 상세설명	정의	미디어시스템의 주요 장비 구성
	세부 내용	ㅇ 미디어시스템은 미디어서버와 소프트웨어 등으로 구성. ㅇ 미디어서버는 고해상도 영상 콘텐츠를 원활하게 구동할 수 있는 이상의 성능을 지닌 미디어 서버군을 제안‧설치함. ㅇ 콘텐츠 영상 상영 설정을 비롯해 시작시간/종료시간의 시간설정 기능과 ON/OFF 자동화 기능이 들어가도록 하여야함. ㅇ 콘텐츠의 추후 증‧개편이 용이하도록 하는 기능 포함

요구사항 고유번호		SIR-003
요구사항 명칭		시스템 설비(통신‧음향 포함)
요구사항 분류		시스템 구축 요구사항
요구사항 상세설명	정의	시스템 장비 설치 및 운용시스템 구축
	세부 내용	ㅇ 영상․음향 장비, 콘트롤박스 등 제반 설비는 유지 관리가 쉬워야 함. ㅇ 기기의 모든 케이블은 신호 결손이 없도록 완벽히 결선이 가능한 상태로 제작되어야 함. ㅇ 소요 실감콘텐츠 및 영상‧음향장비의 특성을 정확히 이해하고 설계에 임하며, 치유 콘텐츠로 몰입도 있는 환경을 조성하도록 함. ㅇ 영상‧음향장비가 최고 성능을 발휘할 수 있는 환경을 조성함(전기․소방․기계․조명․통신망 등의 인프라 구축 포함). ㅇ 음향은 콘텐츠에 최적화 되도록 하고, 지향각도, 음량을 고려해 설계함 ㅇ 각종 작동이 필요한 설비는 누구나 이용하기 쉽게 조작이 간편해야 하며, 납품 시 장비별 셋팅법, 유지보수법 등이 담긴 사용설명서를 제출해야 함. (※ 관리자 매뉴얼, 사용자 매뉴얼 제공)

요구사항 고유번호		SIR-004
요구사항 명칭		공간인테리어
요구사항 분류		시스템 구축 요구사항
요구사항 상세설명	정의	치유공간 조성
	세부내용	ㅇ 시설 및 구조물은 이동, 해체 또는 조립이 용이하도록 규격화․모듈화하고, 각종 장비와 시설은 분리․제작․조립하여 기계․전자 장치만의 별도 유지관리가 이루어질 수 있도록 설계한다. ㅇ 시설물의 제작․설치 및 차후 부품교체, 하자보수, 철거 등 관리유지가 쉽게 제안해야 한다. ㅇ 운영요원이 최소화 될 수 있도록 설계하되, 이에 대한 상시적, 종합적, 체계적 관리 운영 및 유지보수가 이루어 질 수 있도록 제작‧설치되어야 함. ㅇ 시설 및 설비․구조물은 소음․진동 및 관람객의 안전사고에 대한 대비를 위해 내구성이 있는 소재로 구조체를 제작하고 관람객의 행동반경․동선․대기열 등을 고려하여 공간배치를 한다. ◦ 자연과 치유도시 고창의 보물을 적용하여 공간인테리어 구성함 ㅇ 내부시설의 모든 자재는 소방법 관련법규의 기준에 따라 구축해야 한다. 피난동선 확보 및 진출입로 접근이 용이하도록 하며, 소방 사인물을 적소에 설치․이설해 진출입 및 피난을 돕도록 한다.

요구사항 고유번호		SIR-005
요구사항 명칭		조명 계획
요구사항 분류		시스템 구축 요구사항
요구사항 상세설명	정의	전시환경과 조화된 시스템
	세부내용	ㅇ 조명은 기존의 건축조명을 면밀히 조사하여 기능유지에 적합하고 소모품 교체 및 컨트롤이 용이하도록 함. ㅇ 공간의 분위기 연출 및 최적화된 콘텐츠 구현을 위해 적절한 조명계획(콘텐츠별 조명, 관리용 조명, 조도 기준, 구간별 조도 분포 등)을 수립함. ㅇ 별도 공간을 구성하는 경우 그에 상응하는 조도계획을 하여야 하며, 경우에 따라 조도 조절 및 선택적 전멸이 가능한 조명기구를 계획하고 설치함. ㅇ 시스템 내외에 설치하는 조명은 콘텐츠 운영에 지장이 없게 하여야 하며 난반사나 눈부심을 최소화할 수 있도록 설치해야 함.

사. 테스트 요구사항

요구사항 고유번호		TER-001
요구사항 명칭		테스트 유형 및 환경 구축
요구사항 상세설명	정의	테스트에 대한 유형 및 테스트 환경에 대한 구축 방안
	세부 내용	ㅇ 시스템 등의 신뢰성 확보를 위한 테스트 환경 구축. ㅇ 각종 테스트의 종류 및 수행방안을 제시하고, 전문가에 의한 디버깅/튜닝 등을 실시하여야 함 ㅇ 테스트에 소요되는 환경 구축, 라이선스, 기술지원에 소요되는 비용은 과업수행기관이 부담하여야 함

요구사항 고유번호		TER-002
요구사항 명칭		시범 운영 방안
요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 상세설명	정의	콘텐츠 서비스 시범 운영 방안
	세부 내용	ㅇ 제공되기로 한 요구사항을 모두 제공해야 하고, 초기 협의한 요구사항에서 변경관리 절차를 통해 승인된 요구사항의 달성이 최종 목표점임. ㅇ 제공되기로 한 요구사항을 제공하는지의 여부는 각 기능 요구사항에 대한 검증(테스트) 활동을 통해 예상하는 결과가 도출되었을 경우를 기준으로 평가함. ㅇ 기능 구현 정확성은 사용자가 직접 테스트 수행기간에 테스트를 수행함 으로써 평가하며, 검수는 발주기관이 수행함. - 시범 운영 이전에 사업자의 별도 콘텐츠 검증(테스트) 필수 ㅇ 시범 운영기간(2주 이상) 동안 발견된 결함을 파악하여 사업기간 완료 이전에 보완 조치를 취하여야 함.

아. 보안 요구사항

요구사항 고유번호

SER-001

요구사항 명칭

보안정책 및 지침 준수

요구사항 분류

보안 요구사항

요구사항

상세설명

정의

보안정책 및 지침준수 내용

세부

내용

ㅇ 보안정책 및 지침을 준수하여 개발

ㅇ 사업자는 보안규정을 철저하게 준수해야 하며, 사업을 개시할 때 착수계와 함께 보안각서를 제출해야 함(※대표자 및 분야별 책임자 등 과업참여자 전체 대상).

ㅇ 사업자는 사업이 진행되는 도중 또는 완료 후 본 용역에 관한 일체 사항을 외부에 누설하여서는 안 되며, 이로 인해 문제가 발생할 경우 모든 책임은 사업자가 부담함.

ㅇ개인정보보호 및 정보보호 관련 정책과 국정원 「정부․공공기관 정보보안 관리실태 평가지표」를 준수하여 개발(웹사이트 제공 해당 시)

ㅇ모바일 전자정부서비스 관리지침 및 소프트웨어 개발보안 가이드에 따른 소스코드 보안성 확보를 위해 착수단계에서 표준 코딩 스타일 정의 및 적절한 개발절차·개발방법론, 교육계획 등을 제시하고 개발

-국가 정보보안 기본지침(국가정보원, 2019. 3.)

-국가‧공공기관 용역업체 보안관리 가이드라인(국가정보원, 2014. 3.)

-개인정보 보호법(행정안전부, 2017. 10. 19 시행)

-문화체육관광부 개인정보보호지침(훈령 제268호, 2015.10.01.)

-웹 응용프로그램 개발 보안 가이드(행정안전부, 2014. 1.)

-공공기관 홈페이지 개인정보 노출방지 가이드라인(행정안전부, 2012. 7.)

-소프트웨어 개발보안 가이드(행안부 발간등록번호 11-1311000-000330-10)

-시스템 개발·운영자를 위한 개인정보보호 가이드라인(행정자치부, 2015.03)

-개인정보의 안전성 확보조치 기준(행정안전부 고시 제2019-47호)

-본 사업은 위 지침 외에도 정부가 제정․공포한 관계 제 법규(지침)을 준수해야 하며,

사업기간 동안 법규가 변경될 경우 해당 법규를 준수

용역사업 중 또는 종료 후라도 본 사업과 관련해 국가정보원 등 관련 기관으로부터

보안에 문제가 있다고 지적될 경우 반드시 해결책을 강구하고 조치하여야 함

요구사항 고유번호

SER-002

요구사항 명칭

보안 취약점 제거

요구사항 분류

보안 요구사항

요구사항

상세설명

정의

보안 취약점 점검 및 제거

세부

내용

ㅇ웹사이트 취약점(OWASP Top 10 및 국정원 발표 취약점) 제거

ㅇ행정안전부의‘소프트웨어 개발보안(시큐어코딩) 관련 가이드’를 준용함.

ㅇ응용S/W 대상 행정안전부‘소프트웨어 보안약점 진단가이드’에 의거 보안 취약점을 분석하고 약점이 있을 경우 조치

ㅇ아래의 웹 취약점 점검 및 보완 조치

- 사용자 인증 취약점 - SQL Injection 취약점 - 악성스크립트 취약점 - 불필요한 파일 및 정보노출 취약점	- 관리자 페이지 노출 취약점 - XSS 취약점 - 유해파일 업로드 취약점 - 파일목록 및 파일내용 노출 취약점

요구사항 고유번호

SER-003

요구사항 명칭

사업 수행에 대한 보안대책 수립 및 준수

요구사항

상세설명

정의

계약단계부터 완료단계까지 준수해야할 보안대책 마련

세부

내용

ㅇ계약단계에 보안대책 수립

◈ 누출금지 대상정보

① 기관 소유 전산시스템의 내ㆍ외부 IP주소 현황

② 세부 전산시스템 구성현황 및 전산망구성도

③ 사용자계정 및 패스워드 등 시스템 접근권한 정보

④ 전산시스템 취약점분석 결과물

⑤ 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드(해킹ㆍ유출시 안보ㆍ국익에 피해가 우려되는 중요 용역사업일 경우에 해당)

⑥ 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입현황

⑦ 방화벽ㆍIPS 등 정보보호제품 및 라우터ㆍ스위치 등 네트워크장비 설정 정보

⑧ ‘공공기관의 정보공개에 관한 법률’ 제9조1항에 따라 비공개 대상정보로 분류된 기관의 내부문서

⑨ ‘공공기관 개인정보보호에 관한 법률’ 제2조2호의 개인정보

⑩ ‘보안업무규정’ 제4조의 비밀, 同 시행규칙 제7조3항의 대외비

⑪ 기타 공개가 불가하다고 판단한 자료

※ 정보누출 적발시 관련법에 따라 처벌 등 참자자격 제한 등 제재 조치

ㅇ고려할 보안관리 대상: 참여인원, 자료, 사무실‧장비, 내․외부망 접근, 응용프로그램, 사업완료 시점(※구체적인 전산보안지침 사업설명회 시 별도고지)

아. 품질 요구사항

요구사항 고유번호		QUR-001
요구사항 명칭		콘텐츠 품질관리
요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 상세설명	정의	품질관리방안
	세부 내용	ㅇ 콘텐츠 품질보증을 위한 품질관리계획(보증절차, 보증내용, 보증방법, 보증시기, 보완방안, 보증조직 등)을 제시하고, 사업수행 시 진행한 내용을 기반으로 사업완료 시 결과보고서에서 보완하여 제출. ㅇ 콘텐츠 품질관리는 전문가 감수, 2주 이상의 시범운영을 통함.

요구사항 고유번호		QUR-002
요구사항 명칭		시스템 가용성 확보
요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 상세설명	정의	시스템 성능관리 및 가용성 확보
	세부 내용	ㅇ 시스템은 1일 24시간, 365일 상시운영 하며, 시스템 장애 시 복구대책 제시 ㅇ 시스템 제어 등은 자동으로 ON/OFF를 포함한 서버에서 일괄 운영할 수 있는 시스템이 구축되어야 함. ㅇ 펌웨어(firmware) 패치 및 업그레이드 : 최신 시스템 펌웨어 정보 및 기술정보 제공, 펌웨어 패치 적용 및 업그레이드 지원 ㅇ OS 환경설정 점검 및 튜닝 : 시스템 구성환경에 대한 기술점검 및 시스템 자원사용 툴 분석/최적화 적용 ㅇ 백업방안 및 시스템 S/W, 응용S/W 등의 종합적인 보안대책 강구 ㅇ 개발 완료 후의 시스템 안정화 계획 및 방안 제시

요구사항 고유번호

PMR-001

요구사항 명칭

인력 관리

요구사항 분류

사업관리 요구사항

요구사항

상세설명

정의

사업수행을 위한 인력의 투입

세부

내용

ㅇ 창의적이고 역량있는 제작자, 유사과업 수행한 경험 있는 전문인력 투입 요망.

ㅇ 투입인력에 대하여 참여인력 현황(추진조직, 인력구성 및 자격‧경력사항)을 제출하고, 단계별 인력 투입계획, 역할, 투입율 등을 제시해야 하며, 인력변경은 발주기관의 사전승인을 얻어 시행함.

ㅇ 본 사업수행의 핵심인력은 다음과 같다.

구분	투입인원	관련경력	역할
총괄책임자(Project Manager)	1명	7년 이상	본 용역 총괄 관리
제작자(Producer)	콘텐츠 당 1명	5년 이상	실감콘텐츠 개발, 구현 및 관리
관리자 (Manager)	1명	5년 이상	시스템 구축 및 공간 조성

- 총괄책임자(PM)는 사업자의 대표기관 소속으로서, 사업을 총괄하는 전문인력(콘텐츠개발 관련경력 7년 이상 고급기술자)으로 함.

- 총괄책임자(PM)는 투입인력의 기술 수준을 상세히 제시해야 하며, 추후 주요 인력은 발주기관 동의 없이 임의로 변경할 수 없다.

- 사업의 관리‧설계를 담당하는 콘텐츠별 제작자와 분야별 관리자는 고급(관련경력 5년 이상) 이상의 기술자임. 단, 제작자의 경우 탁월한 창작력이 인정되는 5년 이상 경력자로도 대체가능하다.

ㅇ 제안서에 기재된 투입인력의 자격 및 경력사항 등 중요한 내용이 허위로 밝혀지는 경우, 발주기관은 계약파기, 손해배상청구 등 필요조치를 시행함

자. 사업관리 요구사항

요구사항 고유번호		PMR-002
요구사항 명칭		사업 인력 관리
요구사항 분류		사업관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	인력 관리 방법
	세부 내용	ㅇ 총괄책임자와 제작자, 관리자는 사업종료일까지 상주근무 원칙. 투입인력은 근로기준법 등 노동관계 법령을 따르되 사업 참여율 100% 초과는 불가함. ㅇ 발주기관은 사업수행 중 인력 교체 또는 품질제고를 위한 추가인력 투입‧교체를 요구할 수 있고, 사업자는 발주기관의 요구에 즉시 부응해야 함. ㅇ 휴가․병가․교육 등 인력공백 발생 시 대체인력 투입하며, 사업자의 인력교체 요청은 사고․이직․입원 등 투입인력의 업무수행이 불가한 경우에만 허용. ㅇ 발주기관의 문서에 의한 승인 없는 인력교체는 계약위반행위로 간주되며, 부득이한 경우 2주 이상의 업무인수인계 기간을 가져야 함(인수인계 기간에 추가 투입된 인력은 계약에 의한 투입인력으로 간주하지 않음. ※인력 근무시간(투입시간)은 수행인력 명단의 문서승인 이후부터 합산하여 정산).

요구사항 고유번호		PMR-003
요구사항 명칭		사업관리
요구사항 분류		사업관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	사업관리 상세
	세부 내용	ㅇ 사업 수행기간 동안 발생하는 각종 산출물의 효율적인 관리를 위해 다음과 같은 사안을 실행한다. - 단계별로 진행상황을 보고하고 관련 산출물을 제출함 - 종류별 개요 및 전달시기, 제출부수 등을 구체적으로 제시함 - 문서화 방안, 산출물 관리 방안을 구체적으로 제시함 ㅇ 위험관리 프로세스를 명시하고, 발생 가능한 위험요소에 대하여 대책(조치계획 수립)을 세부적으로 기술함 ㅇ 사업기간 내지 유지관리 기간 중 각종 법률․규정의 변경 발생 시 프로그램 수정 보완하여 제공. ㅇ 사업자는 사업수행 중 또는 종료 후 발견되는 오류나 문제점에 대하여 적절한 조치를 해야 하며, 이에 소요되는 제반 비용을 일체 부담하여야 함

요구사항 고유번호		PMR-004
요구사항 명칭		보존, 유지 및 시범운영 관련
요구사항 분류		사업관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	사업관리 상세방안
	세부 내용	ㅇ 기록물 제작: 사업공정 단계별 작업사진 등을 촬영해 사업종료 시 제출. ㅇ 운영매뉴얼 작성: 시설 설비의 안정적 작동, 효율적인 유지보수, 관리․운영 위한 매뉴얼을 작성하고, 소요비용을 산정하여 기술함. 필요 인력 및 장비를 상술하되 긴급사항 발생 시의 응급조치, 유지보수(교체․정비) 비용, 주기 등 관리방안을 함께 제시하여야 함 ㅇ 시범운영: 시스템 조성이 완료되면 2주간 시범운영 실시. 시범운영 기간에 배치되는 관리/운영 인력은 설계 시 산출한 투입인력과 일치해야 함. 기간 중 발생한 제반 문제점은 즉시 수정․보완하고, 추가비용은 사업자가 부담.

요구사항 고유번호		PMR-005
요구사항 명칭		하도급 관리방안
요구사항 분류		사업관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	하도급 관리 및 관련 법률 준수
	세부 내용	ㅇ 하도급 비율제한 및 재하도급 금지: 「소프트웨어산업 진흥법」과 관련된 사항은 하도급할수 없으며, 「소프트웨어산업 진흥법」을 제외한 나머지 분야는 적법한 범위 내(하도급 비율은 공종별 50%를 초과할 수 없음)에서 부득이한 경우 발주처의 승인하에 하도급 계약을 허용함. 재하도급은 불허함.

요구사항 고유번호		PMR-006
요구사항 명칭		사업 변경
요구사항 분류		사업관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	계약의 변경과 해지
	세부 내용	ㅇ 발주기관의 사정에 의한 계획 변경으로 사업범위가 증감될 때, 사업 연기/변경이 불가피해 발주기관의 승인을 받았을 때 사업 변경이 가능함. ㅇ 사업수행 중 과업내용의 중요한 변경요인이 발생하거나, 계약금액 결정에 명백한 하자/착오가 있을 경우, 발주기관과 협의하여 조정 및 결정. 이 때 발주기관이 요청하면, 과업이행내용 등에 비추어 사용내역 증빙을 제출. ㅇ 발주기관의 필요로 인해 원활한 사업추진에 지장이 생길 우려가 있을 경우 상호 협의하여 과업기간을 변경‧중지 또는 연장할 수 있음. ㅇ 부득이한 사유로 인해 당초 계획대로의 시행이 어려운 경우, 계약만료일 이전에 관계 사유를 명시하여 증빙자료 제출, 타당한 사유로 인정될 때에 관계법령이 정하는 범위 내에서 계약기간 조정 가능. ㅇ 계약의 전부 또는 일부의 해지 - 내용 부실 및 관리 미흡 등으로 사업수행 및 목적달성이 불가능한 경우 - 발주기관의 지시에 불응하여 사업을 진행하거나, 정당한 이유 없이 사업자가 계약조건 및 지시사항을 성실히 이행하지 않을 경우 - 기타 계약조건에 위배되는 경우

요구사항 고유번호

PMR-007

요구사항 명칭

보고 일정

요구사항 분류

사업관리 요구사항

요구사항

상세설명

정의

보고 일정(안)

세부

내용

ㅇ 사업기간 중 보고 일정은 다음과 같다.

구분	시기	내용	보고서
착수보고	계약 후 10일 이내	수행조직 및 계획 사업수행방안 산출내역서 등	사업수행계획서
주/월간보고 (회의)	주/월 1회 (필요시)	주/월간 계획 및 업무실적 (주요현안 협의/의사결정)	주/월간보고서(정기) (회의록/결과보고)
수시보고	필요시	특이사항 발생 시 - 발주기관 요구 시	업무보고서 (비정기)
중간보고	추후 협의	현 추진사항 및 향후 계획	중간보고서
최종보고	완료 전 1주 이내	사업수행내용 사업수행결과	결과보고서, (인쇄본, SSD 외장하드 등) ※ 결과보고서는 보고 후 준공시 제출할수 있음

요구사항 고유번호		PMR-008
요구사항 명칭		보고관리
요구사항 분류		사업관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	사업수행보고
	세부 내용	ㅇ 업무보고는 아래와 같이 수행함. 1. 착수보고: 계약체결 후 10일 이내에 함. 발주기관에 착수계를 제출하고 사업수행계획서(인력투입계획, 업무분장, 세부공정표 등 명시) 포함한 착수보고 PT 수행. 발주기관의 내용보완 지시 가능. 소요비용은 사업자 부담. 2. 주/월간 보고: 사업추진진도 및 투입인원 등에 관해 월 1회의 월간계획 및 업무실적 보고, 매주 특정 요일의 주간계획 및 업무실적 보고. 일정은 발주기관과 협의하되, 필요시 비정기보고 요청할 수 있음. 3. 중간보고: 기본설계 완료시점, 실시설계의 중간/완료시점에 1회 이상. 4. 수시보고: 발주기관의 요청이나 사업내역 변경 등 사업자가 주요 결정사항에 있어 필요한 경우. 5. 최종보고: 준공일 30일전까지 사업수행결과를 최종보고하며, 집행내역 증빙은 사업완료 시까지 제출. 증빙자료 미제출 시 미집행으로 간주, 대금지급 시 정산하고 지급함.

요구사항 고유번호

PMR-009

요구사항 명칭

산출물 관리

요구사항 분류

사업관리 요구사항

요구사항

상세설명

정의

산출물 관리 기본 요건

세부

내용

ㅇ 기본 산출물 목록 및 제출시기는 다음과 같다.

보고서	인쇄물	USB	시기
착수계(사업수행계획서)	2부	1매	계약체결 후 10일 이내
콘텐츠 기획 및 시나리오(안)	2부	1매	계약체결 후 2주 이내
중간보고서	2부	1매	중간보고(평가) 후 7일 이내
콘텐츠 검수계획서	2부	1매	사업완료 후 7일 이내
검수 결과보고서	2부	1매	사업완료 후 7일 이내
기술교육/관리 훈련 계획서	2부	1매	교육일 14일 전
운영자 및 사용자지침서	2부	1매	교육완료 후 7일 이내
최종완료보고서 및 전체산출물	2부	1매	검수 완료 후 14일 이내

요구사항 고유번호		PMR-010
요구사항 명칭		검수 및 검사
요구사항 분류		사업관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	검수 및 검사의 개념 정의
	세부 내용	ㅇ 검수/검사는 완료보고서 접수일로부터 14일 이내 실시. 제안요청서, 제안서, 협상결과, 계약서, 사업수행계획서 등과 일치하지 않으면 보완 후 재검수. ㅇ 최종검수 결과, 하자발생으로 계약조건을 이행하지 못한 것으로 판단될 시 보완 또는 재이행 조치를 함. ㅇ 검수완료 후라도 사업자의 책임으로 발생한 모든 사고와 그로 인한 손해는 사업자가 변상조치 하도록 함.

요구사항 고유번호

PMR-011

요구사항 명칭

최종성과품 제출

요구사항 분류

사업관리 요구사항

요구사항

상세설명

정의

산출물 관리

세부

내용

ㅇ 최종성과품 제출 내용과 수량은 다음과 같다.

구분	규격	수량	비고
기본·실시설계 및 성과품 도서	A4 (도면은 A3)	2부	도면(평면도, 최종 설계도면 등), 내역서, 설계설명서, 공정표, 단가산출서, 수량산출서 등 발주기관의 요구사항
운영 매뉴얼	A4	2부	작동·운영·유지보수 방법 등 포함
공정보고서	A4	2부
품목별 식별번호	A4	2부	물품목록정보의 관리 및 이용에 관한 법률에 따라 제출
개발한 실감콘텐츠	USB/HDD	2식	개발소스 및 실행파일 포함
사업기록물(사진 등)	USB/HDD	1식	사진: JPEG
관련 서류 제출	A4	1부	영상물 제작, 그래픽 원본데이터, 안내문 원고, 각종 회의 및 감수 자료, 사업 수행 중 산출된 모든 자료 일체 등 발주기관이 요구하는 사항

ㅇ 인쇄물 이외의 원본파일(HWP 등)은 이메일로 별도로 제출할 수 있고, 최종완료보고서 제출 시 사업수행 중 발생한 모든 산출물을 저장매체(HDD 또는 USB)에 담아 2식 제출한다.

차. 사업지원 요구사항

요구사항 고유번호		PSR-001
요구사항 명칭		관리요원 및 운영요원 교육
요구사항 분류		사업지원 요구사항
요구사항 상세설명	정의	콘텐츠의 운영을 위한 기술교육 실시
	세부 내용	ㅇ 기술교육 매뉴얼 제작과 기술교육 실시 - 교육내용과 교육계획은 실시 14일 전까지 S/W, H/W를 구분하여 제출 - 시스템 교육에 대한 책임과 소요비용은 사업자가 담당 및 부담함 - 교육자료는 콘텐츠 동작 개요, 기능, 운영방법, 유지보수에 필요한 구성, 백업, 기능복구 및 고장복구, 시스템 에러 처리법 등을 포함함

요구사항 고유번호		PSR-002
요구사항 명칭		하자보수
요구사항 분류		사업지원 요구사항
요구사항 상세설명	정의	하자보수 지원방안 제시
	세부 내용	ㅇ 설치물 가동일로부터 1년 내에 발생한 제품 하자에 대한 책임은 사업자가 지며, 결과물의 무상 하자보수 기간은 준공 후 검수완료일로부터 1년임. ㅇ 사업자는 하자보수보증금율과 계약금액을 곱해 산출한 금액(하자보수보증금)을 보증서 또는 증권 등으로 발주기관에 제출한다.

요구사항 고유번호		PSR-003
요구사항 명칭		지적재산권 관리
요구사항 분류		사업지원 요구사항
요구사항 상세설명	정의	산출물의 지적재산권 관리 및 콘텐츠 제작 시 저작물 활용
	세부 내용	ㅇ 지식재산 귀속 - 업무수행 중의 취득물, 성과품, 산출물 등에 대한 소유권은 사업 완료와 동시에 발주기관에 자동귀속되며, 사업과 관련한 계약목적물의 지식재산권은 발주기관과 사업자가 공동소유함을 원칙으로 한다. 단, 발주기관이 최종산출물의 품질 향상과 보급 확대 혹은 변화된 기술 표준에 조응하기 위해 콘텐츠의 보완개발을 추진하고자 할 때, 사업자는 이를 위한 협의에 적극적으로 임해야 하며, 발주기관과 문서로 협의함 없이 지식재산권의 복제‧배포‧개작‧전송 등 및 상업적인 사용‧수익의 도모를 독자적으로 수행할 수 없다(기타 세부사항은 협의하여 결정). 또한 발주기관의 승인 없이는 제3자에게 계약목적물, 취득물, 성과품, 산출물 등을 제공할 수 없음. ㅇ 저작권 관계법령 위배 금지 - 모든 산출물은 지적재산권과 관련된 사항을 주의해서 제작하여야 하고, 분쟁 발생 시 사업자가 민형사상의 모든 책임을 져야 하고, 소요되는 모든 비용을 부담하여 조속히 분쟁을 해결해야 함. - 저작권료는 사업자가 관련 저작자와 협의하여 사용권에 대한 비용을 지불해서 차후 저작권법 상에 문제가 발생되지 않도록 처리해야 하고, 디자인 개발에 사용되는 이미지 역시 원 소유자의 저작권을 침해하지 아니하여야 하며 구입된 이미지는 구입처 및 사용내역서를 함께 제출하여야 함.

카. 기타 요구사항

요구사항 고유번호		기타-001
요구사항 명칭		안전 관리
요구사항 분류		기타 요구사항
요구사항 상세설명	정의	안전 관리
	세부 내용	ㅇ 일반지침과 기술지침에 밝힌 사항을 따르되 발생할 수 있는 소음, 진동 및 체험객의 부상에 대비하고, 적절한 행동반경 및 동선을 고려하여 사업계획 수립하고 수행해야 함. 하중, 보조시설 종류 및 규모 등 콘텐츠 및 기반시설(H/W 등) 등의 설치 및 운영에 필요한 제반사항 포함

3. 일반지침

◦ 제안자(계약체결 후 ‘사업자’)는 본 지침에 의거해 모든 사업을 수행해야 하고 이에 규정되지 아니한 사항은 관계법령, 정부가 제정한 각종 기준과 연계 검토한 후 수행.

◦ 본 사업의 기본방향, 주제, 내용, 연출, 예산 등을 충분히 숙지한 후 제안서 내용 및 발주기관과 추가로 협의한 사항을 토대로 설계 및 제작․설치.

◦ 본 사업을 수행하기 위해 창의적이고 역량있는 제작자 및 경험이 풍부한 전문인력을 충분히 확보해야 함.

◦ 설계(혹은 시나리오) 및 제작․설치․구매 등 필요시 각 단계별로 발주기관과 협의하여 관련 분야 전문가로부터 자문을 받고, 발주기관과 협의 완료 후 시행.

◦ 사업 추진 시 특허권과 저작권 및 건축․전기․통신․소방․기계․조명 등 관련분야의 법규를 면밀히 검토해 누락사항이 발생하지 않도록 하고, 내부에 설치하는 모든 시스템은 관계법령에 저촉되지 않는 자재 및 설비를 사용해야 함(소프트웨어산업진흥법 등). 이와 관련하여 문제가 발생할 시에는 사업자 귀책사유로 인한 하자로 간주, 사업자가 보완․처리함은 물론 민형사상의 모든 책임을 부담함.

◦ 모든 과업은 건축적 구조나 관람객의 안전에 문제가 없도록 추진하고, 유지․관리․보수 등이 용이하게 설계․시공되어야 함.

◦ 과업 수행 중 정책 변경 등 불가피한 사유 발생 시, 발주기관은 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하거나 과업내용을 변경할 수 있으며, 이에 따른 간접비의 지급은 인정하지 아니함.

◦ 사업자의 귀책사유로 인하여 발생한 손실 또는 피해, 기타 사업 진행상의 지장을 초래했을 경우에 사업자가 이에 대한 책임을 져야 하며, 제3자에게 피해를 주었을 경우를 대비하여 관련 보험 가입 등 안전조치를 강구해야 함.

◦ 선정된 사업자가 계약 체결을 통보받은 날로부터 10일 이내에 계약체결을 하지 않으면 심사위원회에서 선정된 차순위 협상대상자와 협약을 체결할 수 있으며, 이 경우 이의를 제기할 수 없음.

◦ 기타 지침에 명시되지 않은 사항은 발주기관과 협의해 결정하며, 본 지침에 이의가 있는 경우에는 발주기관의 해석을 따름.

4. 기술지침

◦ 모든 규격·사양·품질·성능·효율 등은 관련 법이나 규정에서 제시한 기준 이상으로 설계 하되, 기준이 명확하지 않거나 서로 상이한 경우에는 강화된 기준을 따르고 감독관 및 발주기관의 승인을 얻은 후 설계하여야 함.

◦ 특수장비, 핵심부품, 국외생산 제품 등을 구입하고자 할 경우에는 절차·소요기간 및 관계서류 목록을 제출하여 발주기관과 도입여부를 협의하고, 향후 운영과정에서 부품조달 및 유지보수가 원활히 이루어질 수 있도록 조치하여야 함.

◦ 각종 작동이 필요한 설비의 경우, 사전에 세부 제작도를 작성하고 발주기관의 승인을 받아 제작하여야 함.

◦ 제안 및 시행 시 특허권, 저작권 등 배타적 권리와 관련된 경우 사업자는 반드시 특허권, 저작권 등 배타적 권리의 확보증빙서류를 제출해야 하며 분쟁 발생 시 사업자가 민형사상의 모든 책임을 가짐.

◦ 모든 시설, 장비, 자재 등은 성능과 안전도가 검증된 KS 표시품과 형식승인품 및 그 이상인 제품을 우선 사용해야 하며, KS 표시품이 없을 경우에는 감독관 및 발주기관의 사전 승인을 받아 사용함.

- 품질관리 및 품질보증을 위하여 자재의 시험성적표(시험결과보고서)가 필요할 시에는 설계도서 및 해당 시방서에 일치될 수 있도록 사전계획(반입 전·후)을 수립하여 검토하여야 함

- 제작·설치를 시행함에 있어 소요 재료의 품질기준에 관한 자료와 진행 중 현장에서 시험테스트가 요구될 시에는 해당 종목에 맞는 시험기구 및 장비 등을 비치하여야 함

- 재료 또는 제작·설치의 특수성 등으로 국내에서 시험이 불가능할 경우와 수입자재일 경우에는 외국 시험전문기관에 시험을 의뢰할 수 있으며 사업자는 시험성적서를 제출해야 함

◦ 추락, 파손, 안전사고 등 위험요소가 존재하는 경우 종합적인 안전대책 및 운영관리 계획을 제시하여야 함.

◦ 시설운전, 관리안내서 작성, 운영요원의 교육 등 준공 후 운영관리체계를 수립하고, 안전진단을 시행하여야 함.

◦ 사업자는 계약 결과물의 하자와 관련 검토 및 보수를 하자담보기간 내에 처리하여야 하며, 그 비용은 사업자가 부담하여야 함.

◦ 시운전 또는 운영 단계에서 고장 및 수리(하자이행 기간 중 동일한 부품 및 부위 2회 이상)가 발생하는 시설은 즉시 해결방안을 제시하고, 발주기관의 요구 시 부분 또는 전면 재제작·설치하여야 하며 그 비용은 사업자가 부담하여야 함.

◦ 치유공간을 조성하는 전과정에서 발생하는 폐기물은 사업자가 전적으로 책임지고 반출하여야 하며, 준공 시 개관에 대비할 정도의 준공청소를 하여야 함.

◦ 사업자는 사업수행에 있어서 안전관련 법규에 따라 철저한 안전관리를 시행하고 사고 및 재해방지에 노력하여야 하며, 사고 및 재해가 발생한 경우 즉시 발주기관과 감독관에게 보고하고 그 지시에 따라 필요한 조치를 취해야 하고, 사업 수행 중 발생하는 화재, 도난, 유실, 손상과 사업자 및 하수급자의 종업원 또는 고용원의 안전사고에 대한 모든 책임을 져야 함.

◦ 사업자는 안전관리 책임자를 임명하여 감독관을 경유하여 발주기관에 보고하고, 임명된 안전관리 책임자를 제작·설치현장에 상주시켜야 하며 안전관리 책임자 상주 및 안전관리가 소홀할 경우 감독관 또는 발주기관에서 제작·설치의 중지를 지시할 수 있음.

◦ 사업자는 계약에서 정하는 바에 따라 신의와 성실의 원칙에 입각하여 공간 및 시설을 설계하고 제작·설치하여야 하며, 감독관으로부터 필요한 조치에 대한 지시를 받았을 때에는 특별한 사유가 없는 한 지체 없이 이에 응하여야 함.

◦ 사업자는 계약조건에 위배하여 시공된 부분에 대하여는 재시공 또는 보완하여야 하며, 만약 감독관이 지적한 사항에 대하여 재시공 또는 보완하지 않을 경우 감독관은 다른 방법에 의해 제거 또는 보완하고 그 비용을 사업자에게 청구할 수 있음.

◦ 설계도서 및 시방서에 명기되지 않은 사항일지라도 당연히 수행 및 시공해야 될 사항이나 관계법령에 규정된 사항은 발주기관의 요구에 따라 사업자의 부담으로 제작·설치하여야 함.

◦ 작업 시 소음 및 분진은 최소화해야 하며 발생이 우려되는 경우, 주변 환경의 보호대책을 강구하고, 안내 사인을 설치해야 함.

◦ 본 용역의 결과물 전반의 하자보수기간은 준공 후 1년으로 하며, 제품납품일로부터 1년의 이행(하자) 보증보험증권을 제출하여야 함.

◦ 장기적으로 원활한 시스템 운영을 위하여 발주기관의 요청이 있을 경우는 하자보증기간이 경과한 이후라도 객관적 자료에 근거한 유상의 유지 보수 계약을 이행토록 함.

5. 제출도서의 종류 및 규격

도서명	규격 및 양식
제안사 설명서 (정량적 평가분야)	▪ A4규격(210㎜ × 297㎜)규격 ‘세로’로 작성 2부 ▪ 본 제안요청서에 제공된 서식과 용지 서식을 사용해 작성 원칙 ▪ 법인일 경우 등기사항전부증명서, 법인인감증명서 각 2부 ※개인사업자인 경우, 인감증명서 2부, 주민등록등본 2부 ▪ 사용인감계 2부 ▪ 사업자등록증 사본 2부(원본대조필 명기 후 인감날인)
기술제안서 (정성적 평가분야)	▪ A4규격(210㎜ × 297㎜) ‘가로’로 작성 ▪ 1부 업체명 기입, 10부 업체명 미기입 ▪ 표지는 백색 아트지, 무선장변 제본, 단면인쇄 ▪ 제공된 표지(서식)와 용지서식을 사용 ※ 기준 매수 권장 / 표지, 배면지, 간지 제외 ▪ 제안요청서 중의 「제3장 제안요청 사항 및 제안서 작성지침」, 「제4장 제안서 평가」를 참고하여 작성하기를 권장함
가격제안서	▪ A4규격(210㎜ × 297㎜)규격 ‘세로’로 작성 1부 ▪ 서류봉투 사용 밀봉 – 참고양식 활용
제안서 평가 PT 발표자료	▪ 필요시 제출 ▪ 제안서 내용을 중심으로 20분 이내 발표할 수 있도록 작성 ▪ USB 제출 ▪ 표지 및 내용에 업체명 표기 금지

6. 제안서 포함사항(기술제안서의 목차에 준함)

가. 제안서는 다음의 내용을 포함하는 목차로 구성한다.

(1) 제안 개요

(2) 사업수행

(3) 사업관리

(4) 지원부분

(5) 기타사항

나. 제안서 내용의 세부 작성지침은 다음과 같다.

(1) 제안 개요 : 제안의 목적, 배경, 범위, 제안의 특징 및 전략, 기대효과 등에 대한 명확한 소개

(2) 사업수행

- 추진전략 및 방법 : 본 과업에 대한 전반적인 추진전략 및 방법론 제시

- 실감콘텐츠 기획안 및 제작내용 : 기획의도, 컨셉, 시나리오, 구현(제작)기법, 후반작업(자막, 음악 및 음향, 더빙) 등을 기술함

- 공간-환경조성 기획안 및 제작내용 : 시설, 설비, 전기‧통신‧소방, 미디어아트와 제반 장비 설치 등 시스템 구축을 위한 인프라 및 인테리어 컨셉 및 치유 공간 구성을 위한, 기획의도, 구현방법 등

- 설치되는 하드웨어의 세부 성능 등 상세 기술

(3) 사업관리

- 사업 추진체계

- 수행조직 및 업무분장

⁃ 총괄책임자(PM)는 관련분야 경력 7년 이상

⁃ 실무책임자(제작자, 관리자)는 필히 사업기간 동안 100% 투입 가능한 자이어야 함

⁃ 제안사가 하도급 의사가 있는 경우, 해당 업무 및 (예상)하도급 업체를 제시

⁃ 공동수급업체가 있는 경우 업무분장 내역에 업체별 참여비율을 명시

⁃ 공동수급체 이외의 인력은 하도급으로 간주됨. 하도급 의사를 표시하지 않는 경우, 공동수급체 구성원의 자사인력으로 대체되어야 함(파견 근로자는 원소속사 및 파견근로자 임을 명기)

⁃ 이력사항은 성명, 소속, 해당분야 근무경력, 보유자격증 현황, 본 사업 참여시 임무, 근무경력 및 기술경력, 목표투입공수(M/M), 최근 주요 경력 등으로 구성

- 사업수행전략 및 일정

⁃ 원활한 사업수행을 위한 조직별 전략을 기술하고서 사업추진 예정 일정을 참조하여 추진일정을 상세히 제시함

- 산출물 관리

⁃ 사업추진 과정에 생산된 산출물의 관리방안과 제반 작업 단위별 산출물의 종류, 주요 내용 및 제출시기, 제출부수 등 제시

-  콘텐츠 시범운영 및 품질보증계획

⁃ 콘텐츠 감리, 감수, 시범운영 등을 위한 전반적인 방안 제시

⁃ 품질보증을 위한 조직, 방법, 절차, 내용 제시

(4) 지원부분

-  교육훈련 계획

⁃ 관람객, 관리자, 운영요원 등 이용대상자별 매뉴얼 상세 제시

-  하자보수 계획

⁃ 본 사업의 검수완료 후 하자보수 방안 및 계획에 대해 제시

-  기타 지원사항

⁃ 본 사업과 관련해 지원 가능한 사항에 대한 내용 기술

(5) 기타사항

- 상기 항목에 제시되지 않은 제안 및 제안서 평가 관련 내용이 있을 시는 제안서 작성 분량 한도 내에서 추가 가능

7.  제안사 설명서(정량) 및 제안서(정성) 작성 방법

가. 제안사 설명서 작성방법 2부

(1) 제안사 설명서 작성지침

- 제안사 설명서 작성은 장변 제본으로 책제본(필수)

- 제안사 설명서는 제안요청서에 첨부한 서식을 사용하여 작성한다.

- 쪽 번호는 하단 중앙에 표기하고 전체 쪽수는 표지와 목차를 포함하여 제작하되, 증빙서류는 쪽수에서 제외한다.

- 사업수행능력 평가서에 기입된 일반현황 및 연혁, 조직 및 인력운용 계획, 최근 5년간 사업수행실적, 경영상태 등에 관한 제반사항을 아래 제시한 목차에 따라 간략하게 정리해 기입한다.

목 차	세 부 내 용	비 고
1. 자기평가표	▪ 사업수행능력 자기평가표	서식 제10호 등
2. 일반현황 및 연혁	▪ 제안업체의 일반현황 및 연혁을 명료하게 제시 ▪ 대표자 선임계	서식 제12호 등
3. 조직 및 인력 운용 계획	▪ 사업수행조직 - 보유인력 현황(기술인력 표시 필수) - 투입인력 계획 - 공동계약 가능	서식 제13~16호 등
3. 사업수행실적	▪ 최근 5년간 해당사업과 관련된 사업수행실적 (실적증명서 : 해당기관의 확인을 받아 제출)	서식 제17호, 서식 제18호 등
4. 경영상태	▪ 기업 경영상태 평가 (기업신용평가 등급확인서 첨부)	서식 제24호, 서식 제25호 등
5. 신인도	▪ 신인도 평가 관련 확인	서식 제26호 등

나. 제안서( 작성방법 11부 (평가의 공정성을 위해 로고 및 회사명 사용금지, 1부 제외)

(1) 제안서 작성지침 (필히 준수 요망)

- 제안서 작성은 장변 제본으로 책제본(필수)

- 본 제안요청서에 명기된 목차(제안서 포함사항)에 의해 작성할 것

- 제안서는 30매 이내로 한글(hwp) 또는 MS워드, PPT(표지, 목차 포함)사용, 제안서 및 제안서 설명서는 A4사이즈로 작성

- 제안서 내 구체적인 계획 및 내용, 결과 등을 제시

- 세부산출 근거표는 가격제안서와는 별도 사항으로 제안서 제출 시 별도로 분리하여 제출

- 세부 프로그램별 수행방식 및 내용은 실증적, 구체적 내용으로 작성

- 본 지침에 예시되지 아니한 사항 중 과업에 필요하다고 인정되는  내용 등에 대해 추가제안 가능하며, 제안 요청 사항 중 현실적으로 수행 불가능하다고 판단될 경우 합리적인 대안 제시

- 제안서 작성 시 제안사임을 식별할 수 있는 업체명 등의 내용이 제안서 표지 및 내용 등에 표기될 수 없음 (로고 및 회사명 사용금지 / 대표자명 홍00으로 표기)

- 제안서의 구성은 다음에 명시된 제안서 구성에 따라 각각 세분해서 누락없이 작성하고 기술적인 설명자료 등의 내용이 많을 경우에는 별지를 사용하여 작성

- 제안 내용을 보충하기 위해 참고자료 활용시 참고자료 인용 부분을 명시하며, 제안요청기관에서 요청시 이를 제출

- 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용해서 표현하며, ~를 제공할 수도 있다, ~이 가능하다, ~을 고려하고 있다 등과 같은 모호한 표현은 제안서 평가 시 불가능한 것으로 간주

- 제출된 제안서의 기재내용은 제안요청기관의 요청이 없는 한 수정, 삭제 및 대체할 수 없음

※‘제안사설명서(총2부)-정량평가’,‘기술제안서(총11부)-정성평가’,‘가격제안서(1부)를 구분하여 각각 직접 방문 제출하여 주시기 바랍니다.

다. 기술제안서는 기본적으로 표지, 목차를 포함하여 아래의 방법에 따라 작성되어야 하며, 쪽번호는 하단 중앙에 표기한다.

(1) 항목부호 순서는 「Ⅰ」, 「1」, 「가」,「1)」, 「(1)」, 「①」

구 분	항 목 부 호
첫째 항목 둘째 항목 셋째 항목 넷째 항목 다섯째 항목 여섯째 항목	Ⅰ., Ⅱ., Ⅲ., Ⅳ. ․․․ 1., 2., 3., 4., ․․․ 가., 나., 다., 라., ․․․ 1), 2), 3), 4), ․․․ (1), (2), (3), (4), ․․․ ①, ②, ③, ④, ․․․

(2) 목차 항목 중 해당내용이 없으면 「해당사항 없음」으로 서술

(3) 글자체는 저작권 문제가 없는 폰트로 작성

(4) 글자크기는 문서제목 20포인트, 본문 15포인트, 중간참고내용 13포인트로 하되 필요에 따라 글자크기 변형 가능(용지여백: 위쪽 15, 아래쪽 10, 왼쪽 20, 오른쪽 20, 머리말 10, 꼬리말 10).

8. 제안요청서 효력

가. 제안요청서의 성격

(1) 본 제안요청서의 내용은 발주기관과 제안업체 전체간의 적법한 협의 또는 발주기관의 불가피한 내부 사정에 따라 수정․변경될 수 있음

(2) 본 제안요청서의 내용은 사업자 선정에 필요한 최소한의 요구사항을 기술한 것이며, 제안서 작성 및 사업추진에 따른 제반사항 모두를 상세히 기술한 것은 아님

(3) 제안요청서에 명시되지 않은 사항일지라도 본 사업에 반드시 필요하다고 인정되는 사항은 과업범위에 포함된 것으로 간주함

나. 제안요청서의 효력

(1) 발주기관의 불가피한 사정으로 본 제안요청서의 일부 또는 전부가 변경되거나 취소되는 경우라도 제안업체는 이의를 제기하지 못함

(2) 협상시 제안서에 명시된 내용과 발주기관의 요구에 의하여 수정․보완․변경된 제안내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서의 부속서류로 간주되어 계약서와 동일한 효력을 가지며 계약서에 명시된 경우는 계약서의 내용이 우선함

(3) 제안서 내용에 허위 기재사실이 발견될 경우에는 업체선정에서 제외, 낙찰취소 또는 계약 해지하며, 이로 인한 민․형사상의 모든 책임은 제안자에게 있음

(4) 제안요청서에 대한 질의․답변사항은 모든 제안업체에 동일한 효력을 가짐

(5) 발주기관은 필요시 입찰참가자에 대하여 추가 제안이나 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐. 또한 발주기관이 요청하지 않는 한 제안서의 내용은 수정, 변경, 추가 및 대체할 수 없음

(6) 제안요청서 및 제안서에 명시된 내용의 해석에 있어 그 뜻이 모호하여 의견을 달리하는 경우, 발주기관의 해석에 따름

다. 작성시 유의사항

(1) 모든 제안사항은 현실적으로 제작․설치 및 실행 가능성이 있어야 한다.

(2) 제안서 내용은 명확한 용어를 사용하여야 하며, ‘~를 제공할 수도 있다’, ‘~이 가능하다’, ‘~를 고려하고 있다’ 등과 같이 모호한 표현은 제안서 평가 시 불가능한 것으로 간주한다.

(3) 제안사는 제안내용에 대한 모든 책임을 지며, 발주기관은 제안내용에 대한 확인을 위해 추가자료 요청 또는 현지 실사를 할 수 있다. 이 경우 제안사는 이에 적극 응해야 한다.

(4) 제안요청서 및 관련 자료는 제안서 작성 이외의 목적으로는 사용할 수 없다.

(5) 제안서 작성과 관련된 질의는 지정기일까지에 한하여 서면으로 가능하며, 답변도 서면으로 된 내용만을 유효한 것으로 한다.

(6) 모든 제안 서류의 작성은 한글표기를 원칙으로 하며, 부득이 전문용어를 사용하는 경우 한글로 용어 해설을 표기한다.

(7) 제안서 기재사항을 입증할 수 없거나, 허위로 작성한 사실이 밝혀질 경우, 평가 대상에서 제외한다.

Ⅳ. 제안서 평가

1. 평가 일정 및 방법

가. 평가일정 및 장소: 제안서 마감 후 별도 통보

나. 평가기준: 종합평가 (기술능력 평가 90%, 가격 평가 10%)

(1) 기술능력 평가: 90점

- 사업수행능력 평가(정량적) 15점, 기술제안서 평가(정성적) 75점

(2) 입찰가격 평가: 10점

-「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준 (예규 제134호)」준용

다. 평가방법

(1) 기술능력 평가의 사업수행능력 평가는 정량적 지표에 의한 평가로서 발주기관에서 정한 기준에 따라 제출된 자료에 대해 평가점수를 산정

(2) 기술능력 평가의 기술제안서 평가는 정성적 평가로‘제안서 평가위원회’를 구성하여, ｢지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준｣ 제5장 협상에 의한 계약체결기준 및 본 제안요청서의 세부 평가기준에 의해 평가함

(3) 평가위원의 제안서 평가점수는 최고 및 최저 점수 각 1개씩을 제외하고 나머지 위원의 평가점수를 합산하여 산술 평균한 점수로 하며, 산술 평균한 점수가 소수점 이하일 경우 소수점 다섯째 자리에서 반올림

(4) 협상적격자는 제안서(기술 및 가격) 평가 결과, 기술평가 점수가 기술평가 분야 배점한도의 85% 이상인 자를 선정

(5) 협상적격자 선정은 기술능력평가와 입찰가격평가를 종합평가한 결과 고득점자순으로 하여 1순위로 선정된 업체를 우선 협상대상자로 하며, 협상결렬시 차순위 업체를 대상으로 함

(6) 종합평가 점수가 동일한 경우에는 기술능력 평가점수가 높은 업체를 우선으로 선정하며, 기술능력 평가점수도 동일한 경우에는 추첨으로 정함

(7) 협상적격자와 협상순위가 결정되면 협상적격자에게 협상순위와 협상일정을 개별 통보하며, 미선정 업체에 대한 통보는 생략함

라. 평가위원회 구성 및 운영

(1) 7인 이상 발주기관에서 정한 바에 따라 구성하며 공정한 평가를 위해 명단은 비공개함

(2) 평가 위원회의 구성, 평가기준 및 평가 방법 등에 대한 사항은 발주기관 고유 권한이므로 제안업체는 이에 관하여 어떤 이의도 제기할 수 없음

2. 제안서 설명 (기술능력 평가)

가. 참석범위는 제안업체 임직원 3인(발표자 포함) 이내로 제한하며, 재직증명서와 신분증을 필히 지참하여야 함. 발표는 제안사가 지정한 총괄책임자(PM)이어야 함.

■ 제안서 발표 시 발표자의 자격, 참가자 등

ㅇ 제안서 발표자는 반드시 제안사가 지정한 총괄책임자(PM)이어야 하며, 제안사 소속 임직원으로서 입찰공고일 전부터 제안서 평가일까지 계속해서 재직 중인 자이어야 함. 총괄책임자(PM)는 사업종료 시까지 당해 사업 복무를 원칙으로 함.

※ 발표자가 제안서에 명시된 총괄책임자(PM)가 아닐 경우에는 발표할 수 없으며, 총괄책임자(PM)가 사전에 녹화한 동영상 발표도 인정하지 아니함. 이 경우 기제출된 제안서로 서면으로만 평가함.

※ 발표자 신분 확인[재직증명서, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등) 필수 지참]

ㅇ 발표 장소에는 3인 이내 인원만 입장할 수 있으며, 타 제안사의 발표를 청취할 수 없음.

나. 제안서 발표자료와 제안서의 내용이 일치하여야 하며, 기 제출한 발표자료 이외의 추가 자료를 발표장소에서 배포할 수 없음. 타 제안사의 발표는 청취할 수 없음.

다. 제안서 발표에 사용하는 장비(빔프로젝트, PC 등)는 발주기관에서 제공하는 장비만을 사용함

라. 발표순서는 접수순이며, 타 제안업체의 발표를 청취할 수 없음

마. 발표시간은 업체당 20분 이내로 제한하고 질의･응답 10분 내외이며, 상황에 따라 평가위원회에서 조정할 수 있음

바. 제안서 발표회에 참석하지 않은 제안업체는 평가대상에서 제외함

3. 평가항목 및 배점기준

가. 평가항목 및 배점기준

구 분		평가항목	세부 평가항목	배점	비고
기술 능력 평가 (90)	사업수행 능력평가 (15)	사업수행실적	○ 입찰 공고일 기준 5년간 실적누계	5	15
		기술능력	○ 관련기술인력 확보	3
		경영상태	○ 기업신용도 평가등급	3
		신인도	○ 납품지연 및 부정당업자 제재처분 경력	2
		참여도	○ 사후관리를 위한 지역업체 참여	2
	기술 제안서 평가 (75)	사업의 이해	○ 사업목적과 내용의 이해도	3	10
			○ 유사사례 분석 및 적용의 타당성	3
			○ 제안요청서의 부합성 및 실현가능성	4
		콘텐츠 제작	○ 콘텐츠 기획의 창의성, 우수성, 완성도 ○ 실감콘텐츠 제작을 위한 사업계획 및 기술력의 전문성, 구체성, 우수성, 적절성	10	20
			○ 조직 및 인력의 전문성, 우수성, 적정성 ○ 사업관리(사업, 산출물, 사후관리)	5
			○ 하자보수의 범위, 조치, 절차의 적정성 ○ 운영 계획의 적정성	5
		미디어아트 서비스 시스템 구축	○ 콘텐츠 구현의 하드웨어의 적절성과 성능	10	20
			○ 시스템 구성의 적절성 및 우수성	5
			○ 운영시스템 효율화	5
		공간디자인 연출	○ 자연과 치유 공간 조화	5	15
			○ 공간 조성 창의성과 우수성	10
		공정관리 및 향후 관리‧운영 계획	○ 세부추진일정 및 관리계획의 타당성 ○ 사업수행 조직 및 업무분장 계획의 적정성	5	10
			○ 시범운영계획의 적정성 ○ 관리‧유지‧운영방안의 적정성	5
입찰가격평가(10)		입찰가격	○ 제안가격 평가	10	10
합 계		100			100

나. 기술능력평가 : 90점

(1) 사업수행능력 평가: 정량적 평가(15점)

※ 공동수급체를 구성한 경우, 각 구성원별 해당 점수에 출자비율을 곱하여 그 점수를 합산하여 최종 평가함.

1) 사업수행실적 평가

평가 항목	평가요소	배점	평가방법		비 고
			기준	평점
수행 실적	입찰 공고일 기준 최근 5년간 당해 용역 또는 물품과 유사한 실적 인정 범위 및 인정 규모에 해당되는 누계 실적	5	사업비 200% 이상	5.0점	￮ 사업비 기준(부가세 포함)
			사업비 150% 이상	4.6점
			사업비 100% 이상	4.2점
			사업 비 70%이상~100%미만	3.8점
			사업 비 40%이상~70%미만	3.4점
			사업 비 40%미만	3.0점

※ 실적은 준공 또는 납품 완료된 것만 인정(최소금액 부가세 포함 1억원 이상만 인정)

※ 실적 인정 범위 : 국가, 지방자치단체, 공공기관, 민간 등에서 발주한 디지털콘텐츠 개발 및 미디어 시설시공(방송,VR,AR,MR, 영상콘텐츠 개발 및 전시관 조성 등) 용역

※ 준공(납품)금액이 기재된 발주기관의 발행 실적 증명서 사본(사본에는 사실과 상위 없음 확인 날인 필)을 제출하여야 함(민간 실적의 경우에는 실적증명서, 계약서, 세금계산서를 제출해야 함)

2) 기술능력 평가

항목평가	배점	평가방법
전문인력	3	특급기술자	고급기술자	중급기술자	초급기술자
		각 0.5점	각 0.4점	각 0.3점	각 0.2점
		* 평점 = 인원 x 기술자별 점수 => 평점의 합이 최종점수(최고 3점, 최저 2.1점)

※ 입찰 공고일 기준 6개월 이상 해당업체에 근무하고 있는 기술자만 해당[재직증명서, 공인기관 인증 자격증(해당자), 최종학교졸업증명서, 국민연금관리공단 가입 확인서 첨부(필요한 경우 경력증명서 포함)]

※ 기술인력 등급기준은 엔지니어링산업진흥법 시행령 별표2 준용(전문분야에 대한 제한은 없음)

※  기술자 등급분류 기준표

구 분	기술자격 및 경험기준	학력 및 경험기준
특 급 기술자	기 술 사	∘박 사: 3년 이상 ∘석 사: 9년 이상 ∘학 사: 12년 이상 ∘전문대학 졸: 15년 이상 ∘고등학교 졸: 18년 이상
	∘기사자격: 10년 이상 ∘산업기사: 13년 이상
고 급 기술자	∘기사자격 - 7년 이상 10년 미만 ∘산업기사 - 10년 이상 13년 미만	∘박 사: 3년 미만 ∘석 사: 6년 이상 9년 미만 ∘학 사: 9년 이상 12년 미만 ∘전문대학 졸: 12년 이상 15년 미만 ∘고등학교 졸: 15년 이상
중 급 기술자	∘기사자격 - 4년 이상 7년 미만 ∘산업기사 - 7년 이상 10년 미만	∘석 사: 3년 이상 6년 미만 ∘학 사: 6년 이상 9년 미만 ∘전문대학 졸: 9년 이상 12년 미만 ∘고등학교 졸: 12년 이상 15년 미만
초 급 기술자	∘기사자격을 가진 자 ∘산업기사자격을 가진 자	∘석사 학위자 ∘학사 학위자 ∘전문대학 졸업자 ∘고등학교 졸: 3년 이상

3) 경영상태 평가

신용평가등급			배점	평점
회사채	기업어음	기업신용 평가등급
A+, A0, A-, BBB+,BBB0	A2+, A20, A2-, A3+, A30	A+, A0, A-, BBB+, BBB0	3	3
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-		2.7
B+, B0, B-	B+, B0, B-	B+, B0, B-		2.4
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하		2.1

※ ‘신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률’ 제4조 제1항 제1호 또는 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’ 제335조의 3에 따라 업무를 영위하는 신용조회사 또는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음, 기업신용평가등급으로 평가

4) 신인도 평가

심사항목	평가요소	배점 한도	등 급	평점
가. 납품지연	지체일수	2	A. 최근 2년 이내에 조달청 및 국공립기관과의 계약이행과정에서 지체상금 부과를 받은 자 - 지체일수 60일 이상 - 지체일수 45일 이상 60일 미만 - 지체일수 30 이상 45일 미만 - 지체일수 30일 미만 - 지체일수 없음 단, 여러 건의 지체상금이 중복 부과된 경우의 지체일수 계산은 합산한 기간으로 한다.	0 0.3 0.5 0.7 1
나. 부정당업체제재처분	제재처분		A. 최근 2년 이내에 부정당업체 제재처분을 받은자 B. 최근 2년 이내에 부정당업체 제재처분을 받지않은자	0 1

※ 입찰공고일 기준 최근 2년간 입찰참자자격과 관련된 사항에 따라 입찰참가제한, 부정당업자 제재 처분을 받은 자는 신인도 전체 항목 중 낮은 점수로 처리

※ 납품지연과 부당업체 제재처분 없을시 배점한도 만점 부여

5) 지역업체 참여도

심사항목	평가요소	배점 한도	등 급	평점
가. 지역업체 참 여	참여율	2	A. 사후관리를 위한 지역업체(전북특별자치도) 참여율 - 참여율 0% - 참여율 5% 이상 - 참여율 10% 이상 - 참여율 20% 이상	0 0.5 1 2

(2)  기술제안서 평가: 정성적 평가(75점)

※ 본 제안요청서의 「II. 과업내용 및 지침」(p.11-31)과 「V. 제안서 평가」의 평가항목 및 배점표(p.41)에 표시된 “기술제안서 평가”의 평가항목 및 세부 평가항목과 배점 참조

다. 입찰가격 평가 : 10점

- 「협상에 의한 계약체결기준」(기획재정부 계약예규)에 따름

※ 가격제안서’는 전자제출(입찰) 제출(비예가) 또는 수기제출 / 가격 제출은 반드시 부가세 포함한 금액으로 기재 (낙찰자가 면세사업자인 경우 협상 완료된 입찰금액에서 부가세를 차감한 금액을 계약금액으로 함)

4. 제안서 실격처리 사항

가. 제안업체가 등록 취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 사실을 숨기고 응모한사실이 발견되었을 경우

나. 응모 자격기준에 미달하거나 응모신청서 등 기타 제출된 제반서류에상이한 인감사용 등의 중대한 하자나 허위사실을 기재한 경우

다. 제안내용의 산출금액이 예산범위를 초과한 경우

라. 공정한 심사를 하는데 영향을 미칠 의도로 기록할 사항 이외의 인지가능한 특정 기호 등을 표시하는 등 불공정 행위를 한 경우

마. 심사 과정 등에 정당한 사유 없이 이의를 제기할 경우

바. 그 밖에 평가위원회에서 실격이라고 의결한 경우

Ⅴ. 협상 및 계약

1. 협상적격자 선정

가. 제안서 평가 결과, 기술능력평가 점수가 기술능력 평가분야 배점한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정

나. 협상순서는 합산점수의 고득점순에 의하며 합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우에는 기술능력 평가점수가 높은 제안자를 선순위로 하고, 기술 능력 평가점수도 동일한 경우에는 추첨에 의함

다. 협상적격자와 협상순위가 결정되면 협상적격자에게 개별 통보함

라. 제안서 평가결과 및 협상결과는 공개하지 않으며 이에 대하여 제안 업체는 이의를 제기할 수 없음

2. 협상진행

가. 협상 절차

(1) 협상은 결정된 협상 순위에 따라 협상을 실시하며, 협상이 성립된 경우 차순위 대상자와 협상을 실시하지 않음

(2) 협상대상자와 협상이 성립되지 않으면 동일한 기준과 절차에 따라 순차적으로 차순위 협상 적격자와 협상 시행

(3) 모든 협상적격자와 협상이 결렬될 시에는 재공고 또는 신규 입찰 가능

나. 협상 진행

(1) 기술제안서 협상: 협상대상자가 제안한 사업내용, 이행방법, 이행일정, 제안가격 및 평가위원회에서 권유한 내용 등을 협상대상으로 하며, 협상을 통해 내용의 일부 조정 가능

(2) 가격협상: 당해 사업예산(예정가격을 작성한 경우에는 예정가격) 이하로서 협상대상자가 제안한 가격으로 결정

- 협상대상자가 제안한 내용을 가감하는 경우에는 그 가감되는 내용에 상당하는 금액을 당해 추정금액(예정가격을 작성한 경우에는 예정가격) 범위 내에서 조정하여 계약금액을 결정 가능

(3) 기타 협상내용

- 협상대상자가 제안한 내용 중 미진한 부분이나 불명확한 부분의 구체적인 요구사항 작성

- 제안내용 중 현실성이 없거나 과다 적용된 부분 조정

- 기타 발주기관이 요구하는 사항 등

다. 협상 기간 및 결과통보

(1) 협상개시를 통보한 날로부터 10일내로 하며, 협상 대상자와 협의에 의하여 10일안의 범위 내에서 협상기간 조정 가능

(2) 협상 결과는 당해 협상대상자에게 서면으로 통보

3. 계약체결 및 이행

가. 협상이 성립된 후 특별한 사유가 없는 한 10일 이내 계약 체결

나. 계약의 체결 및 이행에 관하여는 서면 통보한 협상결과와 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 동법 시행령·시행규칙과 이에 근거한 계약의 일반조건 등 일반원칙 준용

4. 계약해지

가. 입찰과정에서 거짓서류를 제출하여 부당하게 계약한 경우

나. 입찰 및 계약 이행과정에서 청렴서약서의 내용을 위반한 경우

다. 정당한 사유 없이 발주기관의 이행 촉구에 따르지 아니한 경우

라. 부도, 파산, 영업정지 또는 영업에 관한 등록･인가･허가 등의 취소, 그 밖의 사유로 계약이행이 곤란하다고 인정되는 경우

Ⅵ. 과업 수행시 준수사항

일반사항

가. 제안자 및 수행자는 본 제안요청서 등을 숙지하고 성실하게 이행하여야 세부 과업내용대로 결과물이 충실하게 제작될 수 있도록 한다.

나. 제안자 및 수행자는 계약을 체결하고 본 과업을 착수하거나 완료할 경우에 착수계와 완료계를 제출하여야 한다.

다. 제안자 및 수행자는 본 과업지시서에 기재되지 않은 사항이라도 업무에 필요한 사항은 발주처와 협의하여 처리하여야 한다.

라. 발주기관이 제공한 자료는 관리에 철저를 기해야 하며, 분실 및 훼손 시 이에 상응한 보상을 요구하면 응해야 한다.

마. 위의 내용은 발주기관의 판단에 따라 일부 변경할 수 있으며, 위에서 언급하지 않은 사항에 대해서는 감독관과 협의 후 결정한다.

바. 본 과업의 이행수준이 발주처가 판단하기에 현저하게 미달하여 2회 이상 시정을 요구하였으나, 이에 응하지 않은 경우에는 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있고, 관계규정에 따라 조치할 수 있다.

사. 계약체결 후 사업수행자는 본 사업과 관련하여 취득한 모든 정보를 일체 유출 또는 누설하여서는 안 되며 임의유출에 대한 책임은 사업수행자에게 있다.

아. 본 서류는 계약의 일부로서 효력을 가진다.

자. 사업의 내용 및 과업수행중 의견의 차이가 있는 경우 발주처의 의견을 우선으로 한다.

카. 사업 종료 후, 후속 용역 계약업체와 인수인계 절차를 성실히 이행하여야한다.

사업수행자의 책임

가. 사업 수행의 안전 등 모든 책임은 사업수행자에게 있다.

나. 사업수행자는 발주기관의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도 수급인의 잘못으로 발생된 과오나 오류 등으로 인한 과업 수행 상 모든 하자에 대하여 용역수행자의 책임이 면제되는 것은 아니며, 사업수행자는 사업 준공 후에도 이러한 사항에 대한 발주기관의 수정·보완요구가 있을 때에는 시정·조치하여야 한다.

다. 사업수행자는 이 과업을 수행함에 있어 관계 법률에 저촉되는 행위 및 제3자에게 피해를 주었을 경우 모든 피해사항에 대하여 책임을 져야 한다.

라. 본 과업을 수행함에 있어 지적재산권과 관련된 사항을 주의해서 제작해야 하며, 본 사업과 관련하여 제3자의 특허권 또는 저작권을 침해하여 주관기관을 상대로 손해배상 청구소송이 제기되면 사업수행자는 피해자 측과 합의 또는 배상하는 등 모든 책임을 진다.

마. 저작권 침해 분쟁 발생 시 손해배상 뿐 아니라 민‧형사상 책임 등 일체의 책임은 사업수행자에게 있으며, 소요되는 모든 비용을 부담하여 조속히 분쟁을 해결해야 한다.

유지관리 사항

가. 사업을 통해 만들어진 콘텐츠 및 시스템등은 운용에 문제가 없도록 운영 방침 등 운영 유지관리 사항을 매뉴얼화 한다.

나. 장애 발생 시 그 원인을 파악하여 조치하고 사후 동일한 장애 발생 시 즉각적으로 대처할 수 있도록 문서화하여 관리 및 제공하여야 한다.

별첨자료 / 관련서식

연번	구 비 서 류	비 고
1	입찰제안서 접수	서식 1
2	입찰참가신청서 1부	서식 2
3	위임장 및 재직증명서 1부	서식 3, 서식 4
4	사업자등록증 사본, 법인등기부등본, 법인인감증명서, 사용인감계, 참가자격 관련 등록증, 면허증사본, 중소기업․소상공인확인서 1부	서식 5
5	서약서	서식 6
6	청렴계약 이행서약서 1부	서식 7
7	보안서약서 1부	서식 8
8	입찰보증금 지급각서 1부	서식 9
9	개인정보 수집, 이용, 제공 동의서	서식 31
10	사업수행능력평가서(정량적 평가분야) : 2부	서식 10
	① 사업수행능력 자기평가표	서식 11
	② 제안업체의 일반현황 및 연혁	서식 12
	③ 제안응모 대표자 선임계, 공동수급협정 현황, 공동수급표준협정서, 공동수급합의각서	서식 13 ~ 서식 16
	④ 최근 5년간 사업수행실적, 사업 이행실적 증명서	서식 17, 서식 18
	⑤ 인력 보유현황, 사업수행조직 및 인원구성, 참여인력 현황 총괄표, 참여인력 이력사항	서식 19 ~ 서식 23
	⑥ 제안업체 경영 상태	서식 24
	⑦ 신용평가등급확인서	서식 25
	⑧ 신인도 평가 관련 확인서	서식 26
11	제안평가서(정성적 평가분야)	서식 27
	① 제안서 및 발표자료 A4 30매 이내 11부 (원본 1부, 사본 10부 - 업체명 및 관련 그림/단어 삭제)	-
	② 제안서 및 발표자료 파일 USB 2개	-
12	① 입찰가격제안서	서식 28
	② 산출내역서	서식 29
13	서면질의서	서식 30

※ 제출된 문서가 사실과 다를 경우, 사업자 선정이 무효화됨을 알려드립니다.

<서식 1>

「세계유산도시고창 사진전시관 치유문화 거점공간 조성 사업」 입찰 제안서 접수
접 수 번 호		2024 -
접 수 일 자		2024년 월 일
제 출 자 (대 표 사)	업 체 명
	대 표 자	(인)
	주 소
	전화번호	TEL : FAX :
고창문화도시센터에서 시행하는「세계유산도시고창 사진전시관 치유문화 거점공간 조성 사업」의 제안서를 붙임과 같이 제출합니다. 붙 임 1. 제안사 설명서(정량적 평가분야) 2부 2. 기술제안서(정성적 평가분야) 11부 3. 정성적 평가 발표 자료가 담긴 USB 2식 고창문화도시센터 귀하

.....................................................<절 취 선>........................................................

제 안 서 접 수 증

귀 센터에서 「세계유산도시고창 사진전시관 치유문화 거점공간 조성 사업」제안입찰에 참여하고자 제안서를 접수하였음을 확인합니다.

접수번호	2024 -	접수일자	2024년 월 일
업 체 명
주 소
대 표 자
접 수 자	고창문화도시센터 치유특화팀 성명 (인)

<서식 2>

입 찰 참 가 (제안) 신 청 서 ※ 아래 사항 중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.					처리기간 즉시
신청인	상호 또는 법인명칭		법인등록번호
	주 소		전화번호
	대표자		주민등록번호
입찰개요	입찰공고번호	제 호	입찰일자	2024년 월 일
	입찰건명
입찰 보증금	납부면제 및 지급확약	본인은 낙찰 후 계약 미체결 시 귀 기관에 낙찰금액의 100분의 5 에 해당하는 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.
대리인 사용 인감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명 : 주민등록번호 :		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 □
본인은 위의 번호로 공고한 귀 기관의 「세계유산도시고창 사진전시관 치유문화 거점공간 조성 사업」 입찰에 참가하고자 귀 기관에서 정한 입찰유의서 및 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 별첨 서류를 첨부하여 입찰참가 신청을 합니다. 붙임서류 : 공고문에 정한 서류 2024년 월 일 신청인 □ 고창문화도시센터 귀하

<서식 3>

위    임    장

입찰참가 신 청 인	업 체 명		사 업 자 번 호
	주 소		전 화 번 호
	대 표 자		생 년 월 일
대 리 인	성 명		생 년 월 일
	업 체 명		전 화 번 호 (휴대폰번호)
	주 소
발주기관에서 시행하는 「세계유산도시고창 사진전시관 치유문화 거점공간 조성 사업」에 응모함에 있어 상기 인을 업체의 대표자 또는 제안공모 신청자의 대리인으로 위임하였음을 증명합니다. 2024. . . 대 표 자 : □ 대 리 인 : □ 고창문화도시센터 귀하
※ 지참서류 : 신분증, 재직증명서 ※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함 ※ 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

<서식 4>

재 직 증 명 서

성 명		생 년 월 일
부서/직위		소 속
주 소
재직기간

위와 같이 당사에 재직 중임을 증명합니다.

2024.    .    .

• 업체명 :

• 주  소 :

• 대표자 :               □

고창문화도시센터 귀하

<서식 5>

사  용  인  감  계

사 용 인 감	• 업체명 : • 주 소 : • 대표자 :

상기인은 귀 기관에서 주관하는 「세계유산도시고창 사진전시관 치유문화 거점공간 조성 사업」 제안공모 제출과 관련하여 입찰・계약 및 이에 수반되는 모든 행위에 대하여 위 인감을 사용하고자 하며, 동 인감으로 인한 법률상 모든 책임은 상기인이 질 것을 확약하고 이에 사용 인감계를 제출합니다.

붙임 : 인감(법인) 증명서 1부

2024.  .   .

• 업체명 :

• 주  소 :

• 대표자 :

고창문화도시센터 귀하

<서식 6>

서    약    서

업    체    명	:

주  소 (소재지)	:

대    표    자	:

「세계유산도시고창 사진전시관 치유문화 거점공간 조성 사업」 입찰에 참여함에 있어 모든 서류와 증빙자료는 신의와 성실의 원칙에 입각하여 작성, 제출하였으며 만일 제출한 서류 및 증빙자료가 부정한 방법으로 작성되었거나 허위로 기재한 사항 등이 확인될 경우 참가자격에서 제외 하여도 아무런 이의를 제기하지 않을 것이며, 사업제안서 평가를 위해 구성된 평가위원회의 구체적인 평가방법과 평가기준, 대상자 선정결과에 대해서도 일체의 이의를 제기하지 않으며, 협상대상자로 선정 시에는 성실하게 계약을 이행할 것임을 확약하고 이에 서약서를 제출합니다.

2024년   월   일

업 체 명 :

대 표 자 :          (인)

고창문화도시센터 귀하

<서식 7>

청렴계약이행 서약서

당사는 부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD 뇌물방지 협약이 발효되고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약제 시행취지에 적극 호응하여 발주기관에서 시행하는『세계유산도시고창 사진전시관 치유문화 거점공간 조성』 입찰에 참여함에 있어 당사 및 공동수급 업체의 임직원과 대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

이를 위반하여 경쟁 입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 것이 사실로 드러날 경우 발주기관에서 발주하는 입찰에 입찰참가 자격제한 처분을 받는 날로부터 2년 동안 참가하지 않겠으며, 경쟁 입찰에 있어서 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 한 사실이 드러날 경우 발주기관에서 발주하는 입찰에 입찰참가 자격제한 처분을 받는 날로부터 1년 동안 참여하지 않고, 위와 같이 담합 등 불공정 행위를 한 사실이 드러날 경우 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 공정거래위원회에 발주관서가 고발하여 과징금 등을 부과토록 하는데 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰․낙찰 또는 계약의 체결․이행과정(준공 이후도 포함)에서 관계공무원에게 직․간접적으로 금품․향응 등의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않겠으며, 이를 위반하였을 때에는 다음 각 호의 1에 해당하는 기간 동안 발주기관에서 시행하는 입찰에 참가하지 않겠습니다.

가. 2억원 이상의 뇌물을 준 자는 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 2년 동안 입찰에 참가하지 못한다.

나. 1억원 이상 2억원 미만의 뇌물을 준 자는 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 1년 동안 입찰에 참가하지 못한다.

다. 1천만원 이상 1억원 미만의 뇌물을 준 자는 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 6개월 동안 입찰에 참가하지 못한다.

라. 1천만원 미만의 뇌물을 준 자는 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 3개월 동안 입찰에 참가하지 못한다.

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계공무원에게 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자결정 취소, 용역 착공 전에는 계약취소, 용역착공 이후에는 발주처에서 전체 또는 일부계약을 해지하여도 감수하고 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임․직원이 관계 공무원에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익 처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

위 청렴계약이행서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로써 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격제한, 계약해지 등 고창군의 조치와 관련하여 당사가 고창군을 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 이의를 제기하지 않은 것을 서약합니다.

2024년    월    일

서 약 자  :  업체명            대표           (인)

고창문화도시센터 귀하

<서식 8>

보 안 서 약 서

제안자	업 체 명		사업자번호
	주 소		전 화 번 호
	대 표 자		생 년 월 일
본인은 귀 기관에서 시행하는 「세계유산도시고창 사진전시관 치유문화 거점공간 조성 사업」제안공모에 제안서를 제출함에 있어 본 제안과 관련된 제반사항을 반드시 준수하고 보안유지에 최선을 다할 것이며, 만일 이를 소홀히 하여 발생되는 모든 사항에 대하여 귀 군의 어떤 조치에도 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다. 2024. . . 서약자 인 (사용인감) 고창문화도시센터

<서식 9>

입찰보증금 지급각서

○ 입 찰 건 명 : 세계유산도시고창 사진전시관 치유문화 거점공간 조성 사업

○ 입 찰 금 액 : 미기재

○ 입찰 보증금 : 입찰금액의 100분의 5이상

본인은 귀 기관에서 시행하는 위의 입찰에 참가함에 있어 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제12조 및 동법시행령 제37조 규정에 의거 입찰보증금을 면제받았으나 동법시행령 제38조의 규정에 의거 귀속사유가 발생하였을 때에는 입찰보증금을 현금으로 지체 없이 납입할 것을 확약하며 각서를 제출합니다.

2024.   .     .

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                     (인)

고창문화도시센터 귀하

<서식 10> - 제안사 설명서(정량적 평가) 표지

접수번호	공 란

「세계유산도시고창 사진전시관 치유문화 거점공간 조성 사업」

제안사 설명서(정량적 평가)

2024년    월    일

업 체 명 :

대 표 자 :

주    소 :

전화번호 :            (FAX :              )

작 성 자 :            (연락처 : 휴대폰 / 이메일 기재)

※ 주의사항 : 표지 A4, 재질은 백상아트지(무코팅), 내지 백상지, 2부만 제출, 장변 제본, 표지 단면 인쇄

<서식 11>

사업수행능력 자체평가표

※ 기술능력 객관적 지표 평가 자체 평점

항 목	세 부 항 목				배 점	평 점	비 고
사업수행실적	누계실적	사업비 200% 이상			5.0점
		사업비 150% 이상			4.6점
		사업비 100% 이상			4.2점
		사업 비 70%이상~100%미만			3.8점
		사업 비 40%이상~70%미만			3.4점
		사업 비 40%미만			3.0점
		상 한 점 수			5점
기술능력	특급기술자				각0.5점
	고급기술자				각0.4점
	중급기술자				각0.3점
	초급기술자				각0.2점
	상 한 점 수				3점
경영상태	회사채		기업어음	기업신용 평가등급	-	-	-
	A+, A0, A-, BBB+,BBB0		A2+, A20, A2-, A3+, A30	A+, A0, A-, BBB+,BBB0	3.0점
	BBB-, BB+, BB0, BB-		A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	2.7점
	B+, B0, B-		B+, B0, B-	B+, B0, B-	2.4점
	CCC+ 이하		C 이하	CCC+ 이하	2.1점
	상 한 점 수				3점
신인도	납품	지체일수 60일이상			0점		최근 2년 이내에 국공립기관과의 계약이행과정에서 지체상금 부과를 받은 자
		지체일수 45~60일			0.3점
		지체일수 30~45일			0.5점
		지체일수 30일미만			0.7점
		지체일수 없음			1점
	제재처분	공고일 기준, 최근 2년 이내에 부정당업체 제제처분을 받은자			1점
	상 한 점 수				2점
참여도	참여율	참여율 0%			0점
		참여율 5% 이상			0.5점
		참여율 10% 이상			1점
		참여율 20% 이상			2점
	상 한 점 수				2점
합계					15점

<서식 12>

제안회사 일반현황 및 연혁

회 사 명		대 표 자
사 업 분 야		사업자번호
주 소
전 화 번 호			E-mail
회사설립년도	년 월		fax
면허/허가/ 등록증보유현황
인력구성 현황	총 명
해당부문사업기간	년 월 ～ 2024년 월 공고일 현재 ( 년 개월)
주요연혁

주1) 자격보유회사는 면허증, 허가증, 등록증 사본 첨부

주2) 특허보유현황은 관련 특허 개수를 면허증, 허가증, 등록증 보유현황에 표시하고 특허증 사본 첨부

<서식 13>

제안응모 대표자 선임계

응모자 (대표자)	업체명 (대표자)	(인)	주민 등록번호		연락처	직장
						자택
	소재지
						C.P

상기인을 고창문화도시센터에서 시행하는 <세계유산도시고창 사진전시관 치유문화 거점공간 조성 사업> 사업을 위한 제안서 응모의 대표자로 선임하고 제안에 관한 모든 권한을 공동제안대표자에게 위임합니다.

□ 참여회사 명단

회사명	대표자 성 명	분 야	주 소	연락처	날 인

※ 공동수급 참여사의 대표자 모두 날인

고창문화도시센터 귀하

<서식 14>

공동수급협정 현황

구 분	업체명	주 소	대표자	전화	출자비율(%)	비고
분담이행
계

※ 공동수급 참여사의 대표자 모두 날인

※ 공동수급협정서 사본 첨부

2024년  월  일

(인)

(인)

(인)

고창문화도시센터 귀하

<서식 15>

공동수급표준협정서 (분담이행방식)

(계약예규) 공동계약운용요령[시행 2021. 1. 1.]

[기획재정부계약예규 제539호, 2020. 12. 28., 일부개정]

제1조(목적) 이 협정서는 아래 계약을 공동수급체의 구성원이 재정, 경영 및 기술능력과 인원 및 기자재를 동원하여 공사․물품 또는 용역에 대한 계획․입찰․시공 등을 위하여 일정 출자비율에 따라 공동연대해 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 : ※기재하지 말 것

3. 발주자명 :

제2조(공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ㅇㅇㅇ

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조(공동수급체의 구성원) ①공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ㅇㅇㅇ회사(대표자 :                소재지 :                           )

2. ㅇㅇㅇ회사(대표자 :                소재지 :                           )

②공동수급체의 대표자는 ㅇㅇㅇ로 한다.

③대표자는 발주기관 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산의 관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조(효력기간) 본 협정서는 당사자 간의 서명‧날인과 동시에 발효하며, 해당계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주기관 또는 제3자에 대하여 사업과 관련한 권리․의무관계가 남아있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조(의무) 공동수급체구성원은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 성실․근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조(책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 분담내용에 따라 각자 책임을 진다.

제7조(하도급) 공동수급체의 각 구성원은 자기 책임하에 분담부분의 일부를 하도급할 수 있다.

제8조(거래계좌) 계약예규 「공동계약운용요령」제11조에 정한 바에 의한 선금, 기성대가 등은 다음계좌로 지급받는다.

1. ㅇㅇㅇ회사(공동수급체대표자) : ㅇㅇ은행, 계좌번호 ㅇㅇㅇ, 예금주 ㅇㅇㅇ

2. ㅇㅇㅇ회사 : ㅇㅇ은행, 계좌번호 ㅇㅇㅇ, 예금주 ㅇㅇㅇ

제9조(구성원의 분담내용) ①각 구성원의 분담내용은 다음 예시와 같이 정한다.

1. 일반공사의 경우

가) ㅇㅇㅇ 건설회사 : 토목공사

나) ㅇㅇㅇ 건설회사 : 포장공사

2. 환경설비설치공사의 경우

가) ㅇㅇㅇ 건설회사 : 설비설치공사

나) ㅇㅇㅇ 제조회사 : 설비제작

②제1항의 분담내용은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 분담내용을 변경하는 경우에는 공동수급체 일부구성원의 분담내용 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도, 법정관리, 워크아웃(기업구조조정촉진법에 따라 채권단이 구조조정 대상으로 결정하여 구조조정중인 업체), 중도탈퇴의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

제10조(공동비용의 분담) 본 계약이행을 위하여 발생한 공동의 경비 등에 대하여 분담공사금액의 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제11조(구성원 상호간의 책임) ①구성원이 분담공사와 관련하여 제3자에게 끼친 손해는 해당 구성원이 분담한다.

②구성원이 다른 구성원에게 손해를 끼친 경우에는 상호협의하여 처리하되, 협의가 성립되지 아니하는 경우에는 운영위원회의 결정에 따른다.

제12조(권리·의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리·의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제13조(중도탈퇴에 대한 조치) ①공동수급체 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 해당구성원 외의 공동수급체의 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

②구성원중 일부가 파산 또는 해산, 부도 등으로 계약을 이행할 수 없는 경우에는 잔존구성원이 이를 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력공시액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당 요건을 충족하여야 한다. <개정 2010.9.8.>

③제2항 본문의 경우에는 제11조제2항을 준용한다.

제14조(하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생하였을 경우에는 분담내용에 따라 그 책임을 진다.

제15조(운영위원회) ①공동수급체는 공동수급체구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

②이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ㅇ통을 작성하여 각 통에 공동수급체 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2024년  월  일

ㅇㅇㅇ (인)

ㅇㅇㅇ (인)

고창문화도시센터 귀하

<서식 16>

공동수급 합의 각서

입찰공고번호	제 호	입 찰 일 자	2024년 월 일
입 찰 건 명

우리는 위의 입찰에 공동수급체를 결성 입찰에 참가하고자 귀 기관에서 정한 각종조건, 제안요청서 및 입찰공고사항 등을 전적으로 승낙하며 대표자는 각 구성원이 합의한 금액으로 입찰하겠으며, 낙찰시 모든 구성원은 대표자가 투찰한 입찰금액으로 이의 없이 계약 체결 및 이행을 성실히 수행하겠음을 결의하였기에 본 합의각서를 제출합니다.

2024년  월   일

공동수급체 대표자

주사무소 소재지 :

상           호 :

성           명 :              (인)

사업자 등록번호 :

주민 등록  번호 :

공동수급체 구성원

주사무소 소재지 :

상           호 :

성           명 :               (인)

사업자 등록번호 :

주민 등록  번호 :

고창문화도시센터 귀하

<서식 17>

관련 분야 최근 5년간 사업수행실적

[주요 사업 내용]

업 체 명 :

연번	① 용역 (공사)명	용 역 (공사) 기 간	②계약금액 (단위 : 백만원)		발주기관			③구체적업무수행 내용 (주요콘텐츠)	④타사와 공동프로젝트수행여부	비 고
					상호명, 관공서명	주 소	전화 번호
1										최대실적
계			소계
			누계

① 용역(공사)명(연도순으로 기재하며 본 업무와 유관한 것만 기재) : 해당 건수별로 정확하게

② 계약금액 : 공동으로 업무를 수행한 경우 총액을 기재하되 자사의 비용만을 괄호 안에 기재

③ 구체적인 업무수행 내용 : 수행작업내용을 단계별(현황분석 및 진단, 기본계획 및 실행계획수립, 업무개발, 장비구입 등)로 작성

④ 공동 프로젝트 수행여부 : 타사와 공동으로 프로젝트를 수행한 경우 타사의 상호명을 기재

⑤ 소계는 최대실적을 제외한 합계를, 누계는 최대실적을 합한 합계를 기재

※ 실적증명원(사실과 상위없음)사본 1부.

※ 단 확인결과 기재된 내용 중 허위사실이 발견된 경우 무효처리함

<서식 18>

사업 이행실적 증명서

신 청 인	업체명(상호)				대 표 자
	영업소재지				전화번호
	사업자번호				제 출 처		고창문화도시센터
	증명서용도		<세계유산도시고창 사진전시관 치유문화 거점공간 조성> 실 적 증 명 용
	사 업 규 모
사업이행 실적내용	사 업 명
	총 사업금액(원)		￦				100%
	계약번호	계약일자	계약기간		이행실적		비 고
					비율(%)	실적(원)
			～
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함 2024년 월 일 기 관 명 : (인)
	발급부서 :
	전화번호 :			담 당 자 : (인)

주 1) 이행실적은 입찰공고 시 제시한 사업범위 및 기준(금액) 등의 참가자격 조건에 부합되는 실적에 한하며, 공동계약으로 이행하였을 경우 비율과 이행실적을 기재하고 단독참여의 경우 실적금액 기재

2)  타 기관에서 발행하는 전산용(실적증명원) 서식도 가능하나 위 서식의 내용을 포함해야 함

<서식 19>

인력 보유 현황

(기술인력 표시 필수)

구분	일련 번호	등 급	기 술 분 야	자 격 종 목	성 명	등록일 (취득일)	경 력 기 간	등록번호	비 고

※ 기술자의 구분은 엔지니어링산업진흥법 시행령 [별표2] 기준에 따르며, 공고일 기준 6개월  이전 입사한 자 명기

※ 기술자 기재순서는 평가 시 참고할 수 있도록 등급순위별로 기재

※ 재직증명서, 자격증, 최종학교 졸업증명서, 경력증명서, 국민연금관리공단 가입 확인서 등 필요한 증명서류 첨부

※ 증명사본 첨부(입찰공고일 이전에 등록된 기술만 인정함)

<서식 20>

사업 수행조직 및 인원 구성

1. 제안사의 조직 및 인원 현황

2. 사업수행 조직 및 인원 현황

			총 괄 책 임 자
			소속, 직위, 성명
○○부문			○○부문				○○부문			○○부문
소속, 직위, 성명, 담당업무			소속, 직위, 성명, 담당업무				소속, 직위, 성명, 담당업무			소속, 직위, 성명, 담당업무

※ 분야별 책임자를 명시하고, 직위 순으로 기재한다.

※ 분야별 기술자 기재순서는 평가 시 참고 될 수 있도록 직위별로 기재한다.

※ 본 수행조직에 등록된 자는 반드시 사업에 투입되어야 한다.

※ 총괄책임자는 용역 전 부문을 총괄할 수 있는 자로 한다.

<서식 21>

참여인력 현황 총괄표

(제출일 기준)

구분	성명	담당 업무	투입 기간	해당분야 업무경력	주요활동내용 (최종학력, 해당분야 자격증 등)	참여율	비고

※ 본 용역에 투입할 전체 인력(채용 예정인력 포함)에 대하여 기재하시기 바랍니다.

※ 구분란에는 팀장, 팀원(해당업체 조직구성에 따라 표기) 등으로 구분 기재하며, 총괄책임자 1명과 콘텐츠별 책임자(제작자, 관리자) 각 1명을 포함하여 작성하시기 바랍니다.

※ 본 사업에 직접 참여하는 종사자를 대상으로 작성(주민등록번호 미기재)하되, 이를 증빙할 수 있는 서류(경력증명서, 재직증명서, 국민연금, 건강보험증 사본) 첨부

※ 참여인력은 반드시 본 사업에 투입가능한 인력으로 구성하여야 하며, 개인별 보유자격 및 경력사항의 허위 작성이 판명될 경우, 평가 후일 지라도 계약업체 선정을 무효화할 수 있음

<서식 22>

참여인력(대표, 총괄책임자, 제작자, 관리자) 이력사항

가. 인적사항

소 속							부서 및 직위
성 명	국 문				(한문)			국 적
	영 문							생년월일
주 소	자 택							전 화		- -
								휴대폰		- -
	직 장							FAX		- -
								E-Mail
본 용역 참여임무				사업 참여기간					참여율

나. 학 력

기 간		학 력			학 위
부터	까지	대학교	전공	지도교수
년 월	년 월			▢▢▢
년 월	년 월
최종학위논문제목

다. 경 력

기 간		근무기관	직위(직명)	비 고
부터	까지
년 월	년 월	▢▢▢대학교	교수
년 월	년 월

라. 주요과제수행업적(최근 3년간 본 과제와 관련 있는 업적만 기재)

과제명	주요 실적	참여기간	과제수행 당시 소속기관	역 할	발주처	비 고

※ 본 과제와 직접 관련된 수행업적에 한하여 표기하며, 주요실적에는 특허출원․등록, 사업화 성공 등을 기재

※ 역할란에는 총괄책임자, 수행자 중 택일하여 기재함

마. 논문 발표 실적(최근 3년간 본 과제와 직접적으로 관련된 논문만 기재)

논문명	주 요 내 용	발표연도	학회명 / 학술지명	비 고

바. 타 과제(수행중, 수행예정, 신청중) 내용

사업기간	과 제 명	주관연구기관	지원기관	사업비(백만원)	역할	참여율	구분

※ 구분란에는 수행중, 수행예정, 신청중을 기재함

※ 역할란에는 총괄책임자, 수행자 중 택일하여 기재함

<서식 23>

참여인력 이력사항

※ 제안사 대표, 총괄책임자, 제작자, 관리자를 제외한 인력 작성

※ 사업별로 참여율 기재

※ 경력란에 사업별로 수행 중인 사업 기재

※ 허위 작성 시 국가계약법 시행령 76조 및 시행규칙 별표 2 [부정당업자

의 입찰참가자격 제한기준]에 의거 입찰참가자격 제한 조치

성 명			업 체		직 책		연 령	세
학 력	대학교 전공				해당분야 근무경력		년 개월
	대학원 전공				학위 및 자격증
본용역참여임무				용역참여기간			참여율	%

경 력 사 항 (자격취득이후 사항 기재)
용 역 명	참 여 기 간 (년.월～년.월)	담 당 업 무 (본 사업과 관련분야)	발주처	비고

※ 경력사항은 본 사업과 밀접한 경력 순으로 기재

※ ‘담당업무’는 본 사업과 관련된 분야 위주로 작성

※ ‘비고’란은 해당 사업 참여시 담당한 역할 기재

<서식 24>

제안업체 경영 상태

구 분	신용평가등급	비고
회사채에 대한 신용평가등급
기업어음에 대한 신용평가 등급

<유의사항>

※ 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제4조 제1항 제1호 또는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제26항의 업무를 영위하는 신용정보업자가 입찰공고일 기준 최근 1년 이내에 평가한 회사채․기업어음에 대한 신용평가등급 또는 기업신용평가등급 중 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다.

※ 회사채, 기업어음에 대한 신용평가등급 또는 기업신용평가등급은 유효기간 내에 있는 것이어야 한다(유효기간 만료일이 입찰공고일인 경우도 인정).

※ 합병한 업체는 합병 후 새로운 신용평가등급으로 평가하며, 합병 후의 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 합병대상업체 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 업체의 신용평가등급을 적용한다.

※ 신용등급확인서 제출

<서식 25>

신용평가등급확인서

발행번호 :

업 체 명		기업 신용 등급
대 표 자
법인등기부등본 (주민등록번호)
사업자 등록번호
주 소
재무결산기준
등급 평가일
등급 유효기간

귀 사의 의뢰에 따라 작성한 기업신용등급인증용 기업신용등급을 아래와 같이 통보합니다.

교부일  2024.   .   .

신용평가기관 :                           (인)

※ 타 기관에서 발행하는 전산용(실적증명원) 서식도 가능하나 위 서식의 내용을 포함해야 함

<서식 26>

신인도 평가 관련 확인서

구 분	사유 (관련법령)	지연배상금	일시	기간	비 고
지연배상금 (지체상금) 부과 또는 부정당업체

본인은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제43조(협상에 의한 계약체결)에 의거 발주된 본 사업의 제안요청서 내용을 모두 숙지하고 응찰에 임하며, 귀 기관에서 정한 신인도 평가 관련 확인서를 제출합니다. 제출된 확인서에 사실 누락 및 허위사실 기재 등이 있을시 모든 책임을 지고, 어떠한 처분도 이의 없이 받아들일 것을 확약 합니다.

2024년      월     일

입 찰 자 :                   (인)

고창문화도시센터 귀하

※ 회사(응모자)가 관계법령에 의해 지체상금 부과 또는 부정당업체 제재 처분된 사실을 기재

※ 해당사항이 없으면 “해당 없음” 표기

<서식 27> - (정성적 평가) 제안 설명서 표지(출력시 삭제)

평가번호

「세계유산도시고창 사진전시관 치유문화 거점공간 조성 사업」

제안 설명서

2024년    월    일

제안업체명 (1부 : 기재, 10부 : 미기재)

<서식 28>

입 찰 가 격 제 안 서
입찰내용	공 고 번 호	제2024 - 호	제안서 제출일		2024년 월 일
	건 명	「세계유산도시고창 사진전시관 치유문화 거점공간 조성 사업」
	금 액 (부가세 포함)	총괄 : 금 원정(￦ )
	준공(납품)년월일	착수일로부터 일
입찰자	업 체 명			사업자번호
	주 소			전 화 번 호
	대 표 자			생 년 월 일
본인은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제43조(협상에 의한 계약체결)에 의거 발주된 본 사업의 제안요청서 내용을 모두 숙지하고 응찰에 임하며, 귀 기관에서 정한 사업 기간 내에 사업을 성실하게 수행할 것을 확약하며 본 가격제안입찰서를 제출합니다. 붙임 : 1. 산출내역서 1부 2023년 월 일 입 찰 자 : (인) 고창문화도시센터 귀하

<서식 29>산출내역서 –필요시 양식 수정 가능

산출내역서

(단위 : 원)

구 분	항 목	내 용	비율(%)	비 고
	소계
	소계
	소계
	소계
총계
일반관리비
이 윤
부가가치세
총사업비			100%

<서식 30>

서 면 질 의 서
대 표 자	(인)	발송일시
업 체 명		전화번호 (FAX번호)
소 재 지		E-mail	반드시 기재
	질 의 내 용
제안요청서 page
	【 질의 내용】 ※ 전 화 : 070-4175-6829 이메일 : gogctf@gctf.or.kr * 이메일로 질의하여야 하며, 반드시 수신여부확인

<서식 31>

개인정보 수집･이용･제공 동의서 (양식)
소속기관	성명	직위	동의여부	서명
			□ 동의 / □ 거부
			□ 동의 / □ 거부
			□ 동의 / □ 거부
			□ 동의 / □ 거부
			□ 동의 / □ 거부
※ 본 과업에 참여하는 인력은 전원 다 서명해 주시기 바랍니다. 본인은 고창문화도시센터에서 시행하는 <세계유산도시고창 사진전시관 치유문화 거점공간 조성> 사업의 입찰과 관련하여, 아래와 같이 본인 개인정보의 수집･이용･제공에 동의합니다. 가. 수집･이용･제공 목적 - <세계유산도시고창 사진전시관 치유문화 거점공간 조성> 사업 입찰 참여에 따른 입찰서류(서식 제1호 ~ 서식 제30호) 확인을 위하여 최소정보를 수집하는데 활용. 나. 수집･이용･제공하는 개인정보의 항목 - 제안사 대표자의 성명, 전자우편, 전화번호, 직장주소, 학력, 경력, 은행/계좌번호, 휴대폰번호 등. - 공동수급체 구성원의 직장주소, 상호, 성명, 사업자번호, 은행/계좌번호 등. - 참여인력의 성명, 소속/직책, 연령, 학력, 경력 등. - 입찰참가 신청 제출자의 성명, 직위, 전화번호, 전자우편 등. 다. 개인정보의 보유 및 이용･제공기간 - 본 동의서가 작성된 때로부터 원 입찰참가 서류 관리를 위한 보유기간까지(10년) 라. 동의를 거부할 권리와 거부에 따른 불이익 - 상기 본인은 상기 개인정보의 수집에 대하여 거부할 권리를 보유하고 있음을 인지하고 있음. - 거부에 따른 불이익: 계약체결 대상에서 제외. 2024년 월 일 고창문화도시센터 귀하

<참고>

가격제안서 봉투 작성방법

□ 앞 면

날인

가 격 제 안 서 재 중

○ ○ ○ 주식회사

대표이사 ○ ○ ○     (인)

날인요

□ 뒷 면

날인

날인

날인

#　봉투사이즈는 330mm × 240mm으로 한다.